투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰[광복교~안양교 주변 도로확장 전기공사 - 총차7회 3차5회]

1. 우리 본부에서 시행 중인 「광복교~안양교 주변 도로확장 전기공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 (총차7회,3차5회) 계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 광복교~안양교 주변 도로확장 전기공사

나. 공사기간 : 2018.12.01. ~ 2020.11.30.(총차 2016.11.14. ~ 2021.12.31.)

다. 계 약 자 : (유)공간전기 대표 황영선

라. 계약변경 내용

구 분		당 초	변 경	비 고
도 급 비	총차	587,459,000	598,400,000	증)10,941,000
	3차	221,585,000	214,190,000	감)7,395,000
공사기간		변 경 없 음		총차 2016.11.14. ~ 2021.12.31. 3차 2018.12.01. ~ 2020.11.30.

마. 변경사유 : 현장여건 변경관련 실정보고 승인사항에 대한 내역 및 물량 변경

라. 예산과목 : 도시안전본부, 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 안양교 확장, 시설비

붙임   1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경내역서(3차, 총차) 1부.

3. 합의서 및 제비율 검증 각  1부.

4. 건설사업단 공문(설계변경 요청) 1부. 끝.

	설비부장
★주무관	박희준		건축설비과장	김은덕		설비부장	08/04 이달영
협조자	재무예산과장	홍은미
시행	설비부-11434	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8630	/전송	02-3708-8659	/	gogold79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)