투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도계획부장
(경유)
제목	신림선 사업기간 연장 및 시운전비 검토 결과 제출

1. 도시철도계획부-6245(2020.7.29.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 신림선 철도종합시험운행 시행지침 개정에 따라 민간사업자가 신청한 사업기간 연장 및 시운전비에 대하여 실시협약 제13조 제①항 제3호 및 제21조 제②항에 의거 아래와 같이 검토결과를 제출하오니 공사기간 연장 및 추가사업비를 확정하여 적용토록 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 검 토 결 과

구 분	사 업 기 간 연 장	시 운 전 비	비고
검토결과	총연장 : 113일 - 시설물검증시험 개시 : 84일 - 종합시험운행 기간 : 29일	증) 121백만원 (919백만원→1,040백만원) ※ 총사업기간 연장 113일에 대한 추가 시운전비

붙 임 : 철도종합시험운행 시행지침 개정 관련 신림선 사업기간연장 검토(도시철도

설비부-5535, 2020.6.4.)보고서 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	박명기		설비계획과장	황영일		도시철도설비부장	08/06 김영수
협조자
시행	도시철도설비부-7553	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7292	/전송	02-772-7308	/		/	대시민공개