실정보고 검토서

공사명

개봉고가 성능개선공사

공사개요

· 위    치: 구로구 개봉로 68~개봉로 124

· 규    모: 폭 18.9m, 연장 332m

· 공사기간: ’19. 8. 12.~’23. 4. 11.

· 도 급 비: 12,278백만 원

· 시공사: 홍익산업개발(주) 외 1

· 감리단: ㈜유신 외 2

· 설계사: ㈜경동엔지니어링 외 2

실정보고 건명

PSP 거더 설계도서 검토결과 반영

실정보고

사유

PSP거더와 보행육교 설계도서에 불분명하거나 상호 모순, 오류를 검토하여 수량 증·감 발생

건설사업관리단

검토의견

PSP거더와 보행육교 설계도서에 불분명하거나 상호 모순, 오류를 검토하여 설계도서에 재 반영함으로써 공사 수량과 관급자재 수량 증·감이 발생함

공기에 미치는 영향

(  -  )  개월

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	PSP거더(일반구간) 1,023ton PSP거더(철도구간) 165ton 보행육교(보도교) 15ton 보행육교(계단) 16ton	PSP거더(일반구간) 1,014ton PSP거더(철도구간) 166ton 보행육교(보도교) 28ton 보행육교(계단) 16ton	감) 9ton 증) 1ton 증) 13m -
도급금액	3,606,933,000	3,657,643,000	증) 50,710,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

- “해당 없음”

발주처

검토의견

PSP거더와 보행육교에 대한 설계도서 검토 결과 수량 증·감 반영에 대한 책임건설사업기술인의 실정보고 내용은 적정함.

비 고

결재

담당

김구

과장

장수철

부장

08/07

김용제