투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	제3차 작업지시 공시기간 연장 승인통보[2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)]

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』 제3차 작업지시와 관련하여 공사기간 연장요청을 승인하오니 설계도서 및 과업지시서, 공사지침서에 의하여 작업을 완료하고 2020. 8. 27.(목) 까지 공사내역서 및 작업사진(전,중,후)등을 첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

나. 계약업체

1) 감리사 : *********

2) 시공사 : **************

다. 작업지시 공사기간 변경사항

1) 작업기간 : (기존) 2020. 7. 10.(금) ~  8. 10.(월)

(변경) 2020. 7. 10.(금) ~  8. 25.(화).  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	(주)동방공업,(주)건양엔지니어링
주무관	정영권		기전과장	08/07 배수웅
협조자
시행	기전과-7869	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)