문서번호	생태환경과-2652
결재일자	2020.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	생태환경과장	공원부장		한강사업본부장
장창수	이정환	김인숙		08/10 신용목
협 조

한강숲·호안 홍수피해 조치계획

2020. 8

공   원   부

[생태환경과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

한강숲·호안 홍수피해 조치계획

한강공원 침수에 따라 한강숲 조성 등으로 식재한 수목에 대하여 피해 조치계획을 수립·시행하여 공원관리에 만전을 기하고자 함.

1		기상상황

▢ 기상특보 및 강수량

구 분	기상특보	누적 강수량 (8.1.~8.6.)	비 고
서 울(도봉구)	호우특보(경보) 한강홍수주의보 (8.6.11:00)	271.2mm
경기북부(동두천)		434.6mm	특별재난지역 선포 (8.7./7개 지역) 철원·안성·아산·천안·음성·충주·제천
강원북부(북춘천)		564.9mm
충청북부(엄정)		466.0mm

▢ 방류량 및 잠수교 수위

수계 방류량	팔당댐	북한강 수계			남한강 수계	잠수교 수 위
		청평댐	소양강댐	춘천댐	충주댐
최대 방류량 (㎥/s)	18,302 (8.6.09:40)	9,797 (8.6.08:00)	2,150 (8.5.23:50)	5,002 (8.5.18:10)	2,999 (8.5.17:30)	11.53m (8.6.14:30)

2		대상지 및 침수현황

▢ 대상지 현황 : 총 19개소

구 분	한강숲(16개소)	자연형 호안(2개소)	생태거점(1개소)
대 상 지	○ 한강숲(’20) : 6개소 - 뚝섬(2), 망원(2), 난지(2) ○ 한강숲(’19) : 10개소 - 반포(2), 광나루(2), 난지, 이촌, 양화, 강서, 여의도, 미루나무	○ 광나루(’20) : 1개소 - 천호대교~올림픽대교 ○ 이 촌(’18) : 1개소 - 동작대교~한강대교	○ 여의샛강 상류 주변(’19) : 1개소

▢ 대상지별 침수현황

구 분		대상지별 침수수위(최고)	비 고
강남 (10)	광나루(3)	*********************************************	********
	반 포(2)	*********************************	********
	여의도(2)	***************************************	********
	양 화(1)	**************	********
	강 서(1)	************	********
강북 (9)	뚝 섬(2)	******************************	********
	이 촌(3)	********************************************	********
	망 원(2)	******************************	********
	난 지(3)	*******************************************	********

※ 침수기간(4~6일) : 8.3(월)~8.8(토) 기간중 / 대상지별 상이(수위변동도 있음)

3		점검현황

▢ 점검기간 : 8. 3(월) ~ 8. 7(금)

※ 응급복구 전까지 지속적으로 점검

▢ 주요 점검사항

○ 각 사업지별 침수상태 및 유속, 부유물(쓰레기, 수초 등) 영향 등

- 수목 쓰러짐, 기울어짐, 부유물로 인한 덮힘 등

○ 호안 일대 세굴, 사석 및 사면 부설지 유실 여부, 부유물 적치 등

▢ 점검방법

○ 1일 2회(오전, 오후) 사업대상지 순찰·점검

- 점검인원 : 총 5명[생태환경과(과장포함)]

4		조치계획

【 응 급 복 구 】

▢ 복구기간 : 2020. 8. 10 ~ 8. 30 (3주간)

******************************

******************

*************************************************************************************

****************************************

*************************************

▢ 작업내용

○ 쓰러짐, 부러짐, 뿌리뽑힘 수목 : 제거

○ 기울어진 수목                 : 바로세우기(지주목도 정비)

○ 부유물 덮힌 수목              : 부유물 제거 및 바로 세우기

○ 뻘에 덮인 지피물              : 관목, 자생화, 잔디 등 씻어내기

【 향 후 조 치 】

▢ 침수수목 생육상태 예찰(모니터링)

○ 예찰기간 : 8. 10 ~ 9. 30 (8주간)

○ 예찰내용 : 전반적인 생육 환경 및 생육 상태

- 토양상태(지열, 수분), 수목의 줄기, 가지 잎 등 상태(황화현상 등)

- 수목의 병·해충 발생 여부 등

○ 예찰방법

- 현장관찰 : 주 1회 육안 관찰(생태환경과 직원)

- 합동회의 : 한강사업본부, 시공사, 공사감독(서울시설공단) 참여 합동회의 개최

- 자    문 : 전문가 자문(3회)

******

********************************************************************************

******************************************

▢ 향후 방안

○ 자문 및 모니터링 결과에 따라 피해수목의 활착 유도, 처치 등 조치

○ 향후 한강숲 조성 사업 등 수목식재 시 고려(반영)

붙임 : 1. 대상지 현황 1부.

2. 현황사진(침수) 1부.  끝.