투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[난지물재생센터 환경개선사업 전기공사(1차)]

우리 부에서 진행 중인 「난지물재생센터 환경개선사업 전기공사(1차)」에 대하여 준공기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

- 공 사 명 : 난지물재생센터 환경개선사업 전기공사(1차)

- 계약금액 : ***************(총차)

- 공사기간 : 2017.05.26. ~ 2021.04.07.(총차)

- 계 약 자 : 유성건설(주), ㈜유엔테크

나. 변경계약 내용

차수	계약금액		준공기한
	당 초	변 경	당 초	변 경
총차	**************	변경없음	2017.05.26.~ 2020.04.07.	변경없음
1차	************	변경없음	2017.05.26.~ 2020.08.10.	2017.05.26.~ 2021.04.07.

- 준공기한 연기사유 : 선행공정(토목,조경공사) 지연으로 인함

붙 임  1. 검토보고서 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	임재욱		환경설비과장	김오열		설비부장	08/10 이달영
협조자
시행	설비부-11693	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)