문서번호	기전과-7124
결재일자	2020.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
이동훈		代김흥식	08/10 박문희
협조
	관리단속과장		박종윤

궁동터널 디밍제어시스템 설치공사 준공기한 연기 보고

2020. 8.

강서도로사업소

기전과

궁동터널 디밍제어시스템 설치공사 준공기한 연기 보고

궁동터널 디밍제어시스템 설치공사의 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하여 안전한 공사수행에 만전을 기하고자 합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 궁동터널 디밍제어시스템 설치공사

○ 계약금액 : ************************

○ 계약일자 : 2020. 7. 29.

○ 착공일자 : 2020. 7. 29.

○ 준공기한 : 2020. 8. 11.

○ 공사내용 : 디밍제어기 설치

○ 계약업체 : ㈜민호전설

□ 준공기한 연기내용

○ 연기내용 : 당초 2020.7.29. ~ 2020.8.11.에서 2020.7.29.~2020.8.26.로 연기

○ 연기사유 귀책소재 : 발주기관

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유 : 장마 및 집중호우로 인한 절대 공사기간 부족

□ 행정사항

○ 준공기한 연기의뢰(기전과→관리단속과)