문서번호	환경수질과-4177
결재일자	2020.8.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
한미라		최동주	08/10 송영민
협조

- 2020년 이동형화장실 조달 구매 -

납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 8.

한강사업본부

(운 영 부)

- 2020년 이동형화장실 조달구매 -

납품기한 연기 검토보고

한강공원 화장실을 설치하기 위한 「2020년 이동형화장실 조달구매」 추진과 관련 아래와 같이 납품기한을 연기하여 설치에 만전을 기하고 함

□ 사업개요

○ 계 약 명 : 이동형화장실(차량형) 조달구매

○ 사업내용 : 화장실 신규 1동 설치

○ 납품기한 : ***************************

○ 계약금액 : *************

○ 제조업체 : *************

□ 납품기한 연기 검토내용

○ 연기사유

- 장기간 우천으로 인하여 이동형화장실 설치를 위한 기반시설(설치공간, 오수, 전기 등)을 설치가 지연되어 연장

○ 기한연기

**************************

**************************

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 보고자의견

○ 상기와 같이 「이동형화장실(차량형) 조달」 납품기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임  납품기한 연기의뢰서 및 합의각서 1부.  끝.