문서번호	전환도시담당관-6961
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	전환도시사업팀장	전환도시담당관	서울혁신기획관
지은영	김향자	최현정	08/11 정선애

「도봉 도시전환 제작실험실」조성계획 변경

서울혁신기획관

(전환도시담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「도봉 도시전환 제작실험실」조성계획 변경

「도봉 도시전환 제작실험실」조성사업의 투입 대비 효과가 제한적일 것으로 판단, 동 시설은 조성하지 않고「동북권 청년혁신파크」운영 준비에 주력하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

사업목적

○ 향후 도봉구(舊 도봉소방학교 부지)에 조성 예정인「동북권 청년혁신파크」내 대규모 제작실험실 운영에 앞서 사전 활동주체 발굴 등 지역사회 분위기 조성

○ 시민이 도시전환의 주체가 될 수 있도록 기술 및 데이터 등을 활용한 제작 활동의 공공 저변 확대 및 시민 아이디어 구현을 위한 실험공간 제공

추진개요

○ 위    치: 도봉구 마들로11길 75(창동 3,「청년공간 무중력지대, 도봉」부지 내)

○ 구조/용도: 철골조, 제1종 근린생활시설(마을공동작업소)

○ 규    모: 건축 150.75㎡, 연면적 283.1㎡(1층 149.81㎡, 2층 133.29㎡)

(당초 연면적 222㎡, 1층 152.7㎡, 2층 69.3㎡)

○ 사업기간: ’20. 3.~’20. 12.(10개월)

○ ’20 예산: 총 763백만원(시설비600, 감리비10, 시설부대비3, 장비․집기구입비150)

○ 위치도 및 현장사진

위치도	현장사진

Ⅱ		추진경과 및 내용

제작실험실 설계용역 추진

○ 용역기간: ’20. 3. 25.~8. 31.

**************************

○ 용역내용

- 도봉 도시전환 제작실험실 조성을 위한 기본 및 실시설계

- 제작실험실 조성을 위한 자문회의 참석 및 의견 반영

○ 용 역 비: 32,000천원(시설비)

효율적인 운영방향을 위한 운영기획용역 추진

○ 용역기간: ’20. 6. 26.~8. 31.

******************

○ 용역내용

- 국내·외 유사시설 사례 분석 및 환경에 적합한 콘셉트 수립

- 효율적인 운영방안 및 도시전환 프로젝트, 대시민 프로그램 발굴 등

○ 용 역 비: 11,000천원(사무관리비)

제작실험실 방향 설정을 위한 자문회의 추진

○ 1차 자문회의: ’20. 2. 4.

- 도시전환 상징성 구현, 추후「동북권 청년혁신파크」로 이전 설치 고려

○ 2차 자문회의: ’20. 4. 9.

- 쾌적한 제작활동을 위해 넓은 면적 및 높은 층고 확보, 텍스타일 팹랩 형식 검토

○ 3차 자문회의: ’20. 5. 7.

- 지역 상징성 고려, 텍스타일 특화 팹랩 추진(텍스타일 장비 확보)

○ 4차 자문회의: ’20. 5. 13.

- 예산범위 고려하여 건축구조 변경: 중목구조 → 경량철골조

○ 5차 자문회의: ’20. 7. 17.

- 설계결과 공사비 초과로 내역조정 또는 예산확보 필요

Ⅲ		추진상 문제점 및 추진방향

******************************

***********************************************************************

*************************************

********************************************************************************************

*****************************************************************************************

*************************************************************************************************

(단위: ㎡, 백만원)

****	****	****	*****
*****	*****	*****	***************
*****	*****	***	******************* *******************
*****	*****	***	***************
*****	*****	***	************
*****	*****	***	********

**********************************************************

******************************************************************************************************************

******************************************

*****************************************************

*******************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************

**********************************

***************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

**

*******************************************************************

Ⅳ		향 후 계 획

************************************************************************************

******************************************************************