투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	궁동터널 디밍제어시스템 설치공사 준공기한 연기

1. 기전과-7124호(2020.8.10.) 준공기한 연기 보고 관련입니다.

2. 궁동터널 디밍제어시스템 설치공사에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 궁동터널 디밍제어시스템 설치공사

나. 공사기간 : 2020.7.29. ~ 2020.8.11.

다. 준공기한 연기내용

구 분	계약업체	계약금액	준공기한
			당초	변경
궁동터널 디밍제어시스템 설치공사	*****	************	2020.7.29. ~ 2020.8.11.	2020.7.29. ~ 2020.8.26.

라. 연기사유 : 장마 및 집중호우로 인한 절대 공사기간 부족

마. 예산과목 : 강서도로사업소 기전과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로시설물 노후         조명시설 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 준공기한 연기 보고 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

주무관	이동훈		관리단속과장	박종윤		기전과장	代김흥식		강서도로사업소장	08/11 박문희
협조자
시행	기전과-7138	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)