투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	남산공원 석호정내 노후시설 정비공사 설계변경 및 준공기한 연기 시행

1. 시설과-3134(2020. 8. 11.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『남산공원 석호정내 노후시설 정비공사』 건에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연기를 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 남산공원 석호정내 노후시설 정비공사

나. 위   치 : 중구 장충동2가 산14-21번지 일대 (남산공원)

다. 공사기간 : 2020. 07. 20 ~ 08. 13

라. 공사개요

- 시설물공사 : 과녁주변 목재배수로 설치 65m, 과녁 바닥면 정리 207㎡, 진입로 목재계단 설치 61단, 야자매트 설치 65m 등

- 기 타 공 사 : 자재 소운반, 철거공사, 폐기물처리 등

마. 총공사비 : **************************

바. 도급업체 : ******************************

사. 설계변경 내역

구 분		도 급 금 액			비고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		**********	**********	***********
도급액	공급가액	**********	**********	***********
	부 가 세	*********	*********	*********
	소 계	**********	**********	***********

1) 설계변경 사유 : 석호정 운영부서 의견 및 현장여건 반영

2) 예산과목 : 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비,  시설비및부대비, 시설비(100-401-01)

아. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	비고
총공사비	2020. 07. 20 ~ 08. 13	2020. 07. 20 ~ 08. 21	증) 8일

1) 준공기한 연기사유 : 우천으로 인한 절대공기 부족으로 준공기한 연장

2) 준공기한 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 중부공원녹지사업소(시설과)

3) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임   1. 설계변경 내역서 1부

2. 계약금액조정 제비율 검증확인서 1부

3. 합의각서 1부

4. 준공기한 연기의뢰서 1부

5. 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	유경희		조경팀장	이종무		시설과장	08/11 代민경갑
협조자	재무팀장	권소진
시행	시설과-3141	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 4층 서울시중부공원녹지사업소(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5968	/전송	02-3783-5969	/	yghui17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)