문서번호	시설보수과-6407
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
이영택	오재섭	08/11 고영준
협 조
	★주무관		오광준

하계지하보도 출입시설 개선

실시설계 완료보고

2020. 8.

북부도로사업소

(시설보수과)

하계지하보도 출입시설 개선 실시설계 완료보고

우리사업소에서 추진중인『하계지하차도내 보도 출입시설 개선』실시설계 완료 보고임.

□ 관련근거

○ 하계지하차도 내 보도 출입시설 개선계획【시설보수과-2830(2020.3.27.)호】

□ 주요 추진경위

○ ‘20.02.17. : 하계지하보차도(공릉역방향) 개선 요청(노원구청)

○ ‘20.03.06. : 도로시설과 합동점검

○ ‘20.03.27. : 하계지하차도 내 보도 출입시설 개선계획 수립

○ ‘20.05.02. : 예산 재배정(설계비:23백만원)

○ ‘20.03.~08. : 과업지시 및 실시설계 시행(용역사 : 동해종합기술공사)

□ 실시설계(안)

○ 지하보도 상부 출입시설 개선 : 4개소 (폐쇄 2, 축소 2)

- 폐  쇄 : 출입시설 철거후 전면 보도화

- 축  소 : 출입시설 폭 3.1m → 1.7m (감 1.4m), 길이 7.3m

○ 보도 확폭 : 폭 1.5m → 2.9~4.2m (증 1.4~2.7m)

○ 배수펌프 등 장비 반출입을 위한 출입문 설치 : 신설 1개소

범 례
폐 쇄
축 소
출입문

하계지하차도

중계역방향

공릉역방향

○ 계획단면

폐쇄(안)	축소(안)

□ 소요 공사비 : 340백만원

○ 순공사비 : 194백만원 ┳ 토목 :  77백만원

┗ 건축 : 117백만원

○ 제 경 비 : 139백만원

○ 이 전 비 : 7백만원(폐기물처리비)

□ 조치계획

○ 예산 재배정 요청 : 도로시설과

○ 예산 배정 후 공사발주 방침수립(별도 보고)

붙임  1. 공사내역서 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.