문서번호	시설관리과-15496
결재일자	2020.8.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김재현	양창진	유명은		08/12 代안창수
협 조
	주무관		강종구

신정증압장 관련 사업계획 변경

2020. 8.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

신정증압장 관련 사업계획 변경

우리사업소와 계약하여 시행 중인「신정증압장 모터펌프 제작구매 설치 외 1건」에 대하여 사업계획 변경 사유가 발생하여 검토한 결과를 보고 드림.

Ⅰ	사업현황

연 번	사 업 명	사업개요	계약상대자	계약기간	계약금액(천원)	계약번호	비 고
1	신정증압장 모터펌프 제작구매설치	모터펌프 제작 1식 기타 부대공사 1식 등	㈜세고산업 배영석	‘20. 04. 02. ~ ‘20. 10. 15.	99,132	20200401CB701
2	육본증압장외 3개소 원격감시제어반 제작구매설치	원격감시제어반 제작 1식 HMI&Software Application 1식 등	㈜탑정보통신 오영권	‘20. 04. 17. ~ ‘20. 09. 30.	205,445	2020040B95F01

Ⅱ	변경사유

○ 금년도 시행 예정이었던 신정증압장 관련 인입관로 부설 등 추가로 발생한 공정이

내년도 사업으로 변경(시행부서:급수운영과)됨에 따라 후행 공정인 증압장 관련

기전시설물 설치 사업이 불가함

Ⅲ	변경내역

○ 신정증압장 기전시설물 설치를 ⇒ 노후된 타 기전시설물 교체 및 개량으로 변경

연 번	사 업 명	변 경 내 역		계약기간	계약금액	비 고
		당 초	변 경
1	신정증압장 모터펌프 제작구매 설치	신정증압장 모터펌프 신규설치(30HP)	육본증압장 모터펌프 (2006년식, 30HP)	변동없음	변동없음
2	육본증압장 외 3개소 원격감시제어반 제작구매 설치	신정증압장(30HP) 원격감시제어반 신규 설치	신정올림터(30HP, 2008년식) 원격감시제어반 교체
		※ 신정증압장외 3개소는 변동없음

Ⅳ	행정사항

○ 모터펌프 교체대상 변경(신정증압장 → 육본증압장)에 따른 용량검토 및 교체계획 수립[별도계획 수립 시행(단수홍보 포함)]

붙 임 : 관련문서(급수운영과 통보) 1부. 끝.