문서번호	교량안전과-11991
결재일자	2020.8.12.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		조성만	08/12 하현석
협조	교량기획팀장		박동욱
	주무관		남덕희

신림2교 보수공사 추진계획 보고

2020. 08

안전총괄실

(교량안전과)

신림2교 보수공사 추진계획 보고

‘20년 예산사업으로 추진 중인 신림2교 보수공사 추진계획을 보고 드림

○ 사업내용 : 미디어글라스설치 및 시설물 보수공사

○ 공사시행 : 남부도로사업소(시설보수과, 기전과)

○ 유지관리 : 준공 후 미디어글라스 등 기전시설은 관악구로 관리전환

Ⅰ		사업개요 및 추진현황

□ 사업개요

○ 위    치 : 관악구 신림2교(관리주체 : 남부도로사업소 시설보수과)

○ 공사내용 : 미디어글라스 설치 및 시설물 보수공사

○ 사업기간 : ‘20. 8. ~ ‘20. 12.

○ 사 업 비 : 950백만원

신림2교
위 치 도	전경사진

□ 추진현황

○ ‘19. 10. : 도림천 교량 특화사업 추진계획 수립(관악구 구청장방침)

○ ‘20. 01. ~ 06. : 기본 및 실시설계 용역 시행(관악구 도로관리과)

○ ‘20. 08. : 실시설계용역 준공

○ ‘20. 05. ~ 현재 : 신림2교 정밀안전점검 시행 중(남부도로사업소)

⇒ 공사시행 및 유지관리 협의 사항

- 미디어글라스 등 기전시설물 공사 : 남부도로사업소 기전과

- 교량 보수공사 : 남부도로사업소 시설보수과

- 기선시설물(미디어글라스 등) 인수 및 유지관리 예산 확보 : 관악구

Ⅱ		현 안 사 항

□ 신림2교 보수공사비 추가 확보 필요

○ 신림2교 정밀안전점검 외관조사에 따른 손상물량을 실시설계에

반영한 결과 시설물 보수공사비 169백만원 추가확보 필요

○ 보수공사 주요공종

- 교면방수 및 포장 11.2a, 신축이음보수 52m, 콘크리트표면보수 188㎡,

보도부 콘크리트블록포장 35㎡, 보도부 난간설치 120m 등

○ 공종별 공사비 내역

(단위: 천원)

구 분		합 계	도급비	관급비	이전비	부족액
****		*********	*******	*******	*****	*******
**	********	*******	*******	******	*****
**	****	*******	*******	*******	*
	**********	*******	*******	*******	*
	**********	******	******	*	*
	***********	******	******	*

Ⅲ		추 진 방 안

□ 시설물 보수공사 선제적 실시 ⇒ 경관개선 및 시설물안전확보

○ 정밀안전점검 외관조사 결과 발견된 손상 및 안전유해요인에 대하여

미디어글라스 설치와 병행하여 선제적 보수 실시

□ 부족예산 확보 및 예산 재배정

○ 부족예산확보 : 유지보수공사 유보액 700,000천원 중 169,914천원 활용

○ 예산 재배정 : 남부도로사업소 사업시행부서(시설보수과, 기전과)에

각각 재배정

□ 예산재배정 세부내역

(단위: 천원)

구 분	재배정액	예 산 과 목
합 계	1,119,914
시설보수과	185,990	교량관리, 일반교량관리, 신림2교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비
	169,914	교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비
기전과	764,010	교량관리, 일반교량관리, 신림2교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		향 후 계 획

□ 예산 재배정 : 방침 즉시

□ ‘20. 08. 공사발주

□ ‘20. 12. 공사준공

붙임 : 1. 공종별 설계내역서 1부.

2. 신림2교 정밀안전점검 외관조사결과 보고서 1부. 끝.