문서번호	서울특별시차량정비센터-8214
결재일자	2020.8.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	차량정비센터소장
김전연	김명국	08/11 김인호

『서울시차량정비센터 2차년도 내진보강공사』

계약기간 연장 검토보고

2020. 08.

서울시차량정비센터

「서울시차량정비센터 2차년도 내진보강공사」

계약기간 연장 검토보고

「차량정비센터 2차년도 내진보강공사」시행 중, 우천으로 인하여공정이 지연됨에 따라 내진보강공사 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 검토보고 드림

‣ 공사 준공기한 : 당초 2020.09.01. → 변경 2020.09.23.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시차량정비센터 2차년도 내진보강공사

□ 위    치 : 서울시 성동구 가람길 117 차량정비센터 청사

□ 계약기간 : 2020.05.11.~2020.09.01.

□ 공사금액 : ************

□ 계약상대자 : *********

□ 감 리 사 : ***********

Ⅱ		관련근거

□ 내진보강공사 계약변경 요청 : 목우 제 20*******01호

□ 서울시 공사계약 일반조건 : 8절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지 2호 계약기간의 연장

- 계약상대자는 불가항력 사유가 계약기간 안에 발생한 경우에는 수정공정표를 첨부    하여 계약기간의 연장을 청구해야 함.

※ 불가항력이란 : 태풍·홍수·폭염, 그밖에 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병,

폭동 그 밖에 계약대상자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등의 사유

- 악천후(사전적 의미) : 몹시 나쁜 날씨

Ⅲ		검토내용

□ 연장사유 : 우천으로 인한 인한 공사 지연

□ 변경내용

구분	당초	변경	비고
계약자	*********	변경없음
준공기한	2020.09.01.	2020.09.23	22일 연장
계약금액	************	변경없음

□ 계약상대자의 요청사항

-	우천으로 인한 공사 지연에 따라 절대공기 부족으로 계약기간을 22일 연장(2020.09.23.까지) 요청

Ⅳ		검토 결과

□ 현실태

- 전체 공정율 75%로 정상 공정율 85%에 비해 10% 부족

- 차량검사동을 제외한 다른 공사는 거의 준공단계이나, 차량검사동은 야간 또는 주말에만 공사가 가능하며, 댐퍼 설치 기초공사는 완료 했으나,

우천으로 댐퍼 설치는 지연되고 있음(공정율 30%)

□ 공사기간 내 서울지역 강우량 1mm 이상 일수(출처 : 기상청)

구분	총 일수	5.11~5.31	6.1~6.30	7.1~7.31	8.1~8.10
2020년	34일	8	6	10	10
2019년	16일	2	5	8	1

※ 2020.8.14.(금)까지 서울지역 장마 예보(기상청)

□ 검토할 사항

- 우천 일수가 전년도 대비 얼마나 많으며, 그것이 공사지연의 직접적인 원인으로 볼 수 있는가?

- 내진보강공사에서 비(우천)가 오는 것이 악천후에 해당되는지 여부?

□ 검토 의견

- 전년 대비 서울지역 비온 날이 18일 많음

- 차량검사소동 댐퍼 설치는 전체 공정이 외부 공사로 고중량을 다루는 공정 특정상 소량의 우천에도 사고 발생 위험이 있어 공사가 불가능 하므로 비(우천)는 악천후에 해당됨.

- 공사 지연 사유가 장기간의  악천후(장마)에 기인한 것으로, 총괄감리원 검토의견과 같이 공사계약기간을 연장하는 것이 타당하다고 판단됨.

※ 감리용역 계약완수일은 2020.9.11. → 2020.10.5.일로 감리자와 합의 하였음.

붙임  1. 계약변경요청(공문) 및 감리원 검토의견서 1부.

2. 공사 계약 일반조건 1부.  끝.