“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰[아리수 친화거리 음수대 제작구매]

우리 사업소에서 시행중인 『아리수 친화거리 음수대 제작구매』건에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 아리수 친화거리 음수대 제작구매

나. 계 약 자 : ************

다. 계약금액 : ******************

라. 계약기간

1) 당 초 : 2020. 07. 20. ~ 2020. 08. 15.

2) 변 경 : 2019. 07. 20. ~ 2020. 09. 30.(46일 연기)

마. 연기사유 : 선행 공종인 급·배수관 설치 및 전기공사 지연

바. 지체상금 : 미부과(귀책사유-사업소)

붙 임 : 1. 납품기한 연기 보고서 1부.

2. 변경내역 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김초민		급수관리팀장	김승완		급수운영과장	08/11 代김찬모
협조자
시행	급수운영과-13227	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)