코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 요청(공동체주택 지원허브 신축에 따른 엘리베이터 구매 납품기한 연장)

1. 주택공급과-3389(‘20.3.16)호 및 재무과-24200(’20.5.4)호 관련입니다.

2. 공동체주택 지원허브 신축에 따라 추진중인 엘리베이터 구매관련 납품기한을 아래와 같이 변경요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

계약건명	계약번호	계약업체	계약기간		변경사유
			변경 전	변경 후
공동체주택 엘리베이터 구매	2020041234400	주식회사 우성아이디에스 엘리베이터	‘20. 4. 27 ~ ‘20. 7. 16	‘20. 4 27 ~ ‘20. 8. 31	승강로 철탑 구조보완협의 및 보완작업, 승강기안전공단에서 시행하는 승강기 안전인증(설계심사) 검토지역

※ 본 사업은 SH공사에서 대행하고 있어 납품기한 조정 관련 공문 첨부

※  변경계약 추진 지연사유 및 지체보상금 관련사항

대행기관(SH공사)에서 변경계약 요청은 계약종료일 전에 주택공급과에 제출하였으나, 공사 전체일정 연기로 인한 공사 및 계약 기관과의 사전 협의 일정으로 재무과 수신 변경계약 요청이 지연되어 지체보상금은 없는 것으로 진행(계약업체와 사전협의 완료)

따로붙임 :1) 납품기한 조정요청 공문(SH공사) 1부.

2) 기간 연장 관련 사전협의서 1부.  끝.

	주택공급과장
주무관	도난주		주택공급총괄팀장	代김윤석		주택공급과장	08/12 代신현석
협조자
시행	주택공급과-9825	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 14층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-6286	/전송	02-2133-0751	/	urbantj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)