투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	공사 변경계약 의뢰 (양재대로 대모지하차도 가로등이설 전기공사)

1. 설비부-11779(2020.08.10.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인「양재대로 대모지하차도 가로등이설 전기공사」에 대한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명:「양재대로 대모지하차도 가로등이설 전기공사」

나. 도 급 비: 192백만원

다. 도 급 사: ㈜다원종합전설

라. 변경사유

- 토목 공정 변경에 따른 가로등 이설 물량 추가

마. 변경계약 의뢰 내용

구 분	계 약 금 액(원)			계 약 기 간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
	***********	***********	************	************ ***********	****

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	양성옥		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	08/12 代여인웅
협조자
시행	설비부-11878	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송		/	imok90@seoul.go.kr	/	부분공개(5)