투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(종배수관 시공방법 변경 승인)

1. 업무지시현장 : 신상도 지하차도  확장공사 극동엔지니어링 주식회사

2. 작 성 일 자 : 2020-08-12 15:08:13

3. 지 시 내 용

가. 신상도감 2020-152호(2020.8.12.)와 관련입니다.

나.「신상도 지하차도 확장공사」 구간 중 우회도로 포장층 하부에 계획된 종배수관과 관련하여 민원  예방 및 공기 단축을 위한 시공방법 변경에 대하여 승인하오니, 공사의 시급성을 감안하여 선 시공 및 보완설계 반영하여 주시고 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							이시연			방재시설과장					김태중					방재시설부장					08/13 박홍봉
협조자				주무관						김상용
시행			방재시설부-11422									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8764						/전송			02-3708-8756					/	siyeon0907@seoul.go.kr												/	대시민공개