문서번호	방재시설부-5137
결재일자	2018.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		장수철	04/19 이임섭
협 조

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」

사토장 변경 검토 보고

2018.04.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」

사토장 변경 검토 보고

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』관련 사토장 변경에 따른 적정성을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

※ 근거 : 중랑 감 제18-63호(2018.04.06.)

Ⅰ		사 업 개 요

❍ 규    모 : 총인처리시설 Q=412,000㎥/일

❍ 공사기간 : 총괄 2017.09.13.~2019.11.12.

1 차 2017.09.13.~2018.08.30

❍ 계약금액 : 총괄 16.339백만원(1차 13,336백만원)

❍ 시 공 사 : 엘림토건㈜ 외 2

❍ 건설사업관리단 : ㈜천일 외 3

Ⅱ		검 토 내 용

□ 현 황

❍ 당초 설계서에 사토처리는 임시적치장 야적 후 수도권매립지로 처리토록 계획

→ 수도권매립지관리공사 사전협의 결과 페토사 및 쓰레기 혼입 등으로 반입이 불가하다는 통보가 있어 토사 반출이 어려움

❍ 사토장 현황(당초)

구 분	사토 발생량	사토장 위치	운반거리	비고
사 토	38,227㎥	수도권매립지관리공사	L=51.0㎞

□ 추진현황

❍ 2018.02.08. : 사토반출 협의 요청(건설사업관리단 → 도기본)

❍ 2018.02.14. : 사토반출 협의(도기본 → 수도권매립지)

❍ 2018.02.20. : 토사반입 불가 회신(수도권매립지 → 도기본)

❍ 2018.02.22. : 사토반출 협의 결과 알림(도기본 → 건설사업관리단)

❍ 2018.02.22. : 현장 내 잔토 반출에 대한 현장 확인 결과 알림

❍ 2018.04.09. : 사토장 변경 실정보고(건설사업관리단 → 도기본)

□ 사토장 현황

구 분	당초	변경	비 고
위 치	김포시 수도권매립지	인천광역시 서구 거월로 61(제3매립장, 민자구간)
운반거리(km)	51.0	56.88	L=51.0 (적용)
소유주	수도권매립관리공사	수도권매립관리공사
동의여부	불허	동의
면적(㎡)	-	1,033,000
개발행위 허가여부	미대상	미대상
사토가능수량(㎥)	38,227이상	1,033,000×1.5 =1,549,500

❍ 운반거리

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
사 토	51.0km	56.88km	증) 5.88㎞	계약수량

❍ 운반단가

구 분	적용 단가	산 출 내 용	비 고
당 초	12,874원/㎥	집토 후 상차 + 운반 = 12,874원/㎥	계약단가
변 경	12,874원/㎥	집토 후 상차 + 운반 = 12,874원/㎥	계약단가 (사토장 변경)

- 단가 산정기준

· 사토장 :「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제1장 입찰 및 계약집행기준 Ⅶ. 실비의 산정 (3. 설계서 작성 시 주의사항 및 운반거리 변경에 따른 실비의 산정 나항 3)호에 의거 당초 계약 사토수량은 운반로가 변경 된 사항으로 변경단가에 낙찰율 적용

❍ 사토수량

구 분	공 종	단 위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 감
잔토처리	사토처리 (L=51.0KM)	㎥	38,227	38,227	-

❍ 공사비 : 변경없음

Ⅲ		검 토 의 견

<책인건설사업관리기술자>

❍ 토사반입 가능하고 거리가 비슷한 사토장을 선정하여 발생 토사 반출 필요

- 당초 : 수도권매립지 L=51km

- 변경 : 인천광역시 서구 거월로 61(제3매립장), L=56.88km, 증) L=5.88km

※ 운반거리가 미미하여 단가변경 없이 처리

❍ 검토 결과 사토처리가 가능하고 설계거리와 비슷한 장소에 사토장을 선정하고 단가변경 없이 사토장 변경 처리하여 우선 시행토록 하고 차후 설계변경에 반영 필요

Ⅳ		조 치 의 견

❍ 상기 책임건설사업관리기술자 보고내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되므로 추후 설계변경 처리토록 통보코자 함.

- 발생토에 대한 협의결과 토사 부적합으로 통보되어 당초 사토장 반입이 불가한 실정으로 사토장 변경 적정

-「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」및「공사계약일반조건」규정에 의거 낙찰율을 적용

붙임  사토장 변경 실정보고 검토보고서 1부.  끝.