문서번호	토목부-7225
결재일자	2018.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	04/25 김영수
협조
	주무관		남덕희

**** 민원처리 및 교통안전시설 보완 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

인정빌라 민원처리 및 교통안전시설 보완 검토보고

○ 박미지하차도에 인접한 인정빌라 주민 민원사항(차량진출입 개선, 주차장 정비 등) 처리 및 광명시의 교통안전시설 보완 요청에 대하여 조치코자 검토보고 드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  총사업비 : 3,856억원(도급비 1,952억원)

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11.30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜ / ㈜서영엔지니어링

관련 추진경위

❍ '17.11.20 / '17.12.15 : 강남순환도로 공사 관련 주민요구사항 협조 요청(금천구)

- 공사시 소음·진동 최소화

- 인정빌라 앞 보도조성 및 교통안전 확보(차량 진출입체계 개선 및 주차장 정비)

- 인정빌라 담장 재설치

❍ '17.11.28 / '17.12.21 : 인정빌라 주민 요구사항 조치계획 회신

- 암발파공법을 무진동 기계파쇄 공법으로 변경 시행중으로 소음·진동 최소화

- 인정빌라 앞 보도조성 및 주차장 정비, 차량 진출입체계 안전하게 개선

- 담장 재설치는 수용 곤란 (담장도색 및 정문측 블럭정비만 하기로 주민과 합의)

❍ '17.11.21 / '17.12.26 : 교통 민원사항 개선 요청(광명시, 광명경찰서)

- 기아대교 삼거리 및 신촌 휴먼시아 앞 U턴차로 교통안전시설물 보완 요청

건설사업관리단 검토의견

❍ 박미지하차도에 인접한 인정빌라 주민의 고질적 민원을 해소하고, 유관기관(광명시, 광명경찰서)의 교통안전시설 보완 요청에 대하여 조치코자 하는 사항으로 도급자 실정보고 수량 및 금액은 적정한 것으로 검토됨.

❍ 인정빌라 민원 처리

- 박미지하차도 진출차량과 주민차량이 간섭 없도록 안전하게 교통체계 개선

- 인정빌라 앞 보도확보 및 주차장 정비, 담장 도색

박미지하차도

❍ 교통안전시설 보완(광명시, 광명경찰서 요구 반영)

휴먼시아2단지 앞 U턴차로 차선규제봉 설치

기아대교 앞 삼거리 교통안전시설(과속방지턱, 횡단보도, 차선규제봉 등) 보완

공 종	단위	당 초	변경	증.감
인정빌라 민원처리
- 콘크리트포장(t=20cm)	㎡	-	515	515
- 보도포장(투수블록, t=6cm)	㎡	-	32	32
- 경계석	m	-	21	21
- 면정리 및 도장(담장)	㎡	-	115	115
교통안전시설 보완
- 보도포장(소형고압블럭)	㎡	-	25	25
- 반사경	개소	-	1	1
- 노면표지	m	-	168	168
- 차선규제봉	ea	-	40	40
- 과속방지턱	개소	-	1	1

❍ 수량 증·감 현황

❍ 공사비 증·감현황

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
직 공 비	-	34,878	34,878
제 잡 비	-	10,521	10,521
총공사비	-	45,400	45,400

(단위 : 천원)

검토의견

❍ 시흥3동 인정빌라 주민들은 강남순환로 공사기간 내내 많은 민원을 제기해 왔고, 남부도로사업소 이전 부지에서 제외되어 상대적 박탈감 등 서울시에 불만이 많았음.

❍ 주민들과 지속적인 대화로 원만히 협의하여 박미지하차도를 차질없이 개통하였고, 주민 교통안전을 위해 진출입 교통체계 개선 및 보도 확보는 타당하며 담장 재설치 요구에 대해서는 도색과 일부 블록 정비로 민원 해결하였음.

❍ 아울러, 유관기관(광명시, 광명경찰서)의 교통안전시설 보완 요구에 대하여 조치코자하는 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.