문서번호	설비부-5620
결재일자	2018.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
박희정		유병기	04/26 代유병기
협조
	경리과장		代김용범

『올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 및 여의교 확장 공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

2018. 04.

『올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 및 여의교 확장 공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

「올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사」의 보도교

보도등(관급자재) 납품기한을 연장하고자 보고드림

1		계약 현황

□  계약건명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사_도로조명등기구

□  계약금액 : 금64,400,000원(수수료 330,370원 별도)

□  계 약 자 : (주)썬래이 대표자 전현수

□  납품기한 : 2018.04.30.(현장하차도)

□  전기공사 공정율 : 여의교 확장 75%(※공사기간 ’17.03.02.~’18.11.29.)

2		관련 근거

○ 지방자치단체 계약 및 입찰 집행기준 제15장 물품계약일반조건 제7절(2.계약기간의 연장)

○ 주식회사 썬래이 SUN18-0426-01호 납품연기 요청 공문

3		검토 내용

○ 변경 내용

구 분	계 약 금 액	납 품 기 한	비 고
당 초	64,400,000원	’17.11.29.~’18.04.30.
변 경	64,400,000원	’17.11.29.~’18.05.29.	증 29일

○ 변경 사유

- 전체 공정지연(당초 토목준공일 05.29, 10일 이상 준공기한 연장 예정)으로 해당

보도등 납기를 연장하여 현장 시공품질에 만전을 기하고자 함

4		조치 의견

○ 해당 내용을 검토한 결과, 관련 법령에 적합하고 현장 실정에 따른 관급자재 납품기한

연장이 타당하므로 연장계약을 의뢰하고자 함.

붙임 : 납품연기 요청 건(합의각서 포함) 1부.  끝.