문서번호	도로보수과-5044
결재일자	2018.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		김권일	06/01 김용제
협조

2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

제 2차 작업계획 보고

2018. 06.

강서도로사업소

[도로보수과]

제 2차 작업계획 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 03. 14. ~ 2018. 12. 14.

○ 시 공 사 : 이에스피건설 대표 강 상 수

○ 도 급 비 : 금269,043,410원

□ 보고내용

○ 응답소 민원접수 사항 및 도로부속물 유지관리대상 보수

○ 보수대상 및 물량

연번	위 치	작 업 내 용	규격 및 지시물량	작업조건		비고
				주간	야간
1	경인로, 영등포역 앞	무단횡단금지시설 정비	4경간	√		민원
2	여의대방로, 여의도동 5	표지병 설치	124개	√		민원
3	오목로, 오목로 90 우당아파트 앞	과속방지턱 설치	1개소	√		민원
4	중앙로, 중앙로 261 신정네거리역	무단횡단금지시설 정비	3경간	√		민원
5	목동로, 목동로 170 진명여고 앞	무단횡단금지시설 정비	3경간	√		민원
6	가로공원로 98	이미지형 과속방지턱 설치	1개소	√		민원
7	가리봉철도고가 진출입 토공부 옹벽	보수 및 보강	1식	√		정밀점검용역
8	남부순환로, 남부순환로105길 180앞	중앙분리대용 차량 방호울타리 정비	1경간	√		관할서 요청
9	강서로, 동신대아아파트 101동 앞 U턴 구간	시선유도봉 위치조정	10개	√		민원
10	안양천로, 목동 삼성아파트 104동 앞 안전지대	시선유도봉 설치	10개	√		민원
11	등촌로, 목동역 3번 출구 앞 안전지대	시선유도봉 설치	10개	√		관할서 요청
12	경인로, 구로역 앞	시선유도봉 설치	20개	√		민원
13	목동동로, 목동운동장 남문	시선유도봉 설치	20개	√		민원
14	화곡로, 강서구청 인근 원당감자탕 앞	무단횡단금지시설 가로봉 정비	4개	√		민원
15	강서로, 우장산역 앞	무단횡단금지시설 정비	6경간	√		민원
16	노들로, 양화대교 남단, 당산동 51-3	단부 콘크리트 구조물 정비	1개소	√		민원(콘크리트 0.25㎥)
17	노들로, 양화인공폭포 앞 올림픽대로 진출입로	시선유도봉 정비	20개	√		민원
18	목동중앙로, 우성아파트 앞	이미지형 과속방지턱 설치	1개소	√		민원(3.6*15=54㎡)
19	남부순환로, 구로IC 안전지대	시선유도봉 정비	30개	√		민원
20	국회대로, 자전거도로	시선유도봉 설치	100개	√		민원
21	경인로, 오류동 우체국 앞	차량 방호울타리 단부정비	1개소	√
22	개화동로 개화지하차도	시선유도봉 설치	6개	√
23	국회대로 화곡고가차도	시선유도봉 설치	70개	√
24	중앙로 양강중학교~신서중학교	무단횡단금지시설가로봉정비	52개	√

※추후 현장여건에 따라 지시물량의 경미한 변경 가능

□ 조치계획

○ 위 보수대상 시설물을 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수(연간단가) 업체에

작업지시하여 보수하고자하며 추후 설계변경 시 정산처리하고자 합니다.

- 건    명 : 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 제2차 작업지시

- 작업위치 : 경인로(영등포역 앞) 등

- 작업기간 : 2018. 06. 04. ~ 2018. 07. 13.

- 공종 및 물량 :“별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약 49,335천원 (실제 시공물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황                                                (단위 : 원)

공 사 명	도 급 비 (A)	기 집행 공사비 (B)	금회사용(2차) (C)	비고(잔액) (A)-[(B)+(C)]
2018년 도로 및 교통안전 부속물시설물 유지보수공사	269,043,410	143,495,000	49,335,000	76,213,410

붙임 1. 작업지시서 및 위치도 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.  끝.