문서번호	토목부-10277
결재일자	2018.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	06/15 김영수
협조
	주무관		남덕희

박미지하차도 하수관조사 및 도로시설물 설치 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

박미지하차도 하수관조사 및 도로시설물 검토보고

○ 시흥3동 박미지하차도 개통 관련 유관기관(금천구) 협의결과에 따라 하수관 CCTV 조사 및 도로시설물(보도, 시선유도봉, 볼라드 등) 보완 설치코자 검토보고 드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  총사업비 : 3,856억원(도급비 1,952억원)

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11.30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜ / ㈜서영엔지니어링

추진경위

❍  2018.02.08 : 박미지하차도 개통 관련 유관기관 협의 요청

❍  2018.02.08 : 검토의견 회신(금천구 교통행정과-6808)

- 보도설치, 노면표시, 볼라드 설치 등

❍  2018.02.12. : 교통안전시설 협의 회신(금천구 도로과-2109)

- 지하차도 내부 차음벽 및 교차로 점멸신호등 설치

❍  2018.03.02 : 박미지하차도 개통

❍ 2018.03.21 : 박미지하차도 관련 업무협조 요청(금천구 치수과-3170)

- 공사장 주변 기존관 및 신설관 CCTV 조사, 맨홀 신설

건설사업관리단 검토의견

❍ 박미지하차도 개통 관련 유관기관(금천구) 협의 의견에 따라 하수관조사 및 도로시설물을 보완 설치코자하는 사항으로 시공사가 제출한 수량 및 금액을 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨.

❍ 지하차도 주변 하수관 CCTV 조사

❍ 도로시설물 정비 및 보완설치(도로포장, 경계석, 시선유도봉, 볼라드, 맨홀)

❍ 수량 증·감 현황

공 종	단위	당 초	변 경	증 · 감
보도포장	㎡	-	356	356
경계석	개	-	189	189
블럭철거 및 아스콘포장	㎡	-	200	200
유색포장	㎡	-	98	98
시선유도봉	ea	-	6	6
탄성볼라드	개	-	14	14
맨홀(원형1호, D900)	ea	-	1	1
하수관 CCTV조사 및 준설	식	-	1	1

❍ 공사비 증·감현황

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
직 공 비	-	36,297	36,297
제 잡 비	-	10,203	10,203
총공사비	-	46,500	46,500

(단위 : 천원)

검토의견

❍ 박미지하차도 개통을 위해 유관기관(금천구)과 협의하고 그 결과를 반영하여 도로시설물을 정비·보완코자 하는 사항으로, 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 추후 설계변경시 정산 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.