119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	서울종합방재센터 공기조화 실외기 약품세척 계약기간 변경

1.  관련근거

○ 자원관리과-7382(2018.06.22.)호『서울종합방재센터 공기조화기 실외기 약품세척 계획』

○ 제13장 공사계약 일반조건 제8절 제2(계약기간의 연장)관 나항

2. 위와 관련하여 세척관련 작업 실시중 장마전선의 북상으로 인하여 공기조화실외기 특성상 작업중 전기감전등 안전사고 위험 및 세척에 효과도 약품세척등의 효과를 전혀 기대할수 없는 상황으로 부득이 계약기간 변경시행하고자 합니다.

계 약 명 : 서울종합방재센터 공기조화기 실외기 약품 세척

계약금액 : 금2,985,400원(금이백구십팔만오천사백원)

계약일자 : 2018.06.22.(금)

계약업체 : 태정개발(주)

계약변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약금액	2,985,400원	2,986,000원	변경사항 없음
계약기간	2018.06.22.~07.02	2018.06.22.~07.04	2일연장

예산과목 : 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리, 공공운영비(201-02)

붙 임 : 1. 제13장 공사계약 일반조건 1부.

2. 계약연기 요청서 1부.

3. 준공연기 의뢰서 1부.  끝.

담당자	정은택		장비관리팀장	조철수		자원관리과장	06/28 代홍현기
협조자
시행	자원관리과-7640	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 서울종합방재센터	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2132	/전송	02-726-2116	/		/	대시민공개