문서번호	도시철도설비부-7771
결재일자	2020.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	차량과장		도시철도설비부장		도시철도국장		도시기반시설본부장
장재순	강치석		김영수		김진팔		08/13 代김홍길
협 조
	총무부장					강희은

경전철 소음진동 저감방안 수립용역 추진계획(안)

2020. 08.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

경전철 소음진동 저감방안 수립용역 추진계획(안)

경전철 운행중 소음진동 현황과 원인을 분석하고 저감방안을 수립하여 시민불편을 최소화하기 위한 용역추진 계획을 보고 드림

Ⅰ		목적 및 필요성

□ 용역의 목적

❍ 경전철 운행 시 소음 및 진동에 대한 현황을 파악하고, 사례 분석 및 관련법 등을 종합적으로 검토하여 저감대책 및 방안을 마련 운영노선 및 신규 노선 건설 시 설계에 적용하기 위함

□ 용역의 필요성

❍ 협소한 도로 및 주택가에 건설되는 경전철의 특성상 소음진동에 대한 불만 및 민원이 지속적으로 늘어나고 있는 여건을 감안

❍ 현재 운영중인 경전철의 소음진동 원인분석 및 사례조사를 통하여 소음진동 저감대책을 마련하여 향후 경전철 건설사업에 적용 필요

Ⅱ		용역 시행계획

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 경전철 소음진동 저감방안 수립용역

❍ 용역기간 : 2021. 상반기 ~ 2022. 6. 30.(착수일로부터 12개월)

**************************

❍ 예산과목 : 도시철도건설, 신교통수단 도입, 경전철건설사업, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

□ 과업내용

❍ 경전철 소음진동 기존 자료 분석

- 경전철 열차 실내소음 측정 및 분석

- 경전철 소음진동 현황 조사

- 경전철 운영선에서 구간 선로 진동 및 궤도 감쇠율 측정

- 경전철 소음진동 원인 분석

❍ 경전철 소음진동 민원 사례조사

- 피해 발생 유형별 자료분석

- 소음진동 분쟁조정 사례조사

- 소음진동 해외 선진사례 분석

❍ 경전철 관련 소음진동 관련법 검토

- 소음진동 관리법 허용기준 등 검토

- 경전철 소음진동 기준 제시

❍ 경전철 소음진동 저감방안 수립

- 분야별 소음진동 저감방안 제시

- 소음진동 측면에서 레일(노반 등) 관리방안 제시

- 경제성·효율성을 고려한 소음진동 저감방안 수립

Ⅲ		향후 추진계획

❍ ’20. 9. : 용역타당성 심사의뢰(기술심사담당관)

❍ ’21. 3. : 용역발주 심의(기술심사담당관)

❍ ’21. 5. : 용역발주

❍ ’21. 상반기 : 용역계약

❍ ’22. 6. 30. : 준공.  끝.