문서번호	물순환정책과-14465
결재일자	2020.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환정책팀장	물순환정책과장
김종민	이웅희	08/14 代안형준

『예산의 효율적 집행을 위한』

2020년 빗물마을 사업예산 배정계획

2020. 8.

물순환안전국

(물순환정책과)

『예산의 효율적 집행을 위한』

2020년 빗물마을 사업예산 배정계획

마을 단위에서 물순환 회복을 위해 진행 중인 2020년 빗물마을 조성사업의 공사를 위한 예산 배정계획을 보고드림

□ 사업개요

○ 사업대상 : 종로구, 중구, 동대문구, 동작구, 구로구

○ 사업기간 : 2020.01. ~ 2021.06.

○ 소요예산 : 3,390백만원(’20년 2,200, ’21년 1,190)

○ 사업내용 : (서울시) 사업설명회 개최 및 사업공모, 홍보 등

(자치구) 설계, 주민워크숍 개최 및 공사 시행

구 분	종로구 (와룡동)	중구 (다산동)	동대문구 (제기동)	동작구 (신대방동)	구로구 (구로동)
대상면적	20,000㎡	20,000㎡	23,200㎡	22,000㎡	23,000㎡
사업내용	- 투수 및 잔디블록 - 침투측구 - 벽면녹화 - 간이텃밭	- 투수 및 잔디블록 - 침투측구 - 빗물정원 - 담장, 옥상녹화	- 투수 및 잔디블록 - 침투저류조 - 침투측구 - 빗물유입 화단	- 투수 및 잔디블록 - 침투측구 - 띠녹지 - 빗물정원	- 투수 및 식생블록 - 침투측구 - 벽면녹화 - 빗물정원

□ 추진경위

○ ’19.12.26. : 2020년 빗물마을 조성사업 대상지 선정(5개소)

○ ’20.01.20. : 빗물마을 기본 및 실시설계 용역예산 재배정

○ ’20.02.~03. : 빗물마을 기본 및 실시설계 용역발주 및 착수

○ ’20.05.~07. : 주민설명회, 주민워크숍 추진(방문설명 포함)

○ ’20.07.~08. : 빗물마을 기본 및 실시설계 용역준공

※ 종로는 권농동 일대 연계사업이 지연되어 9월 준공 예정

□ 예산 배정계획

○ 공사비(1차) 배정 : 1,610백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	종로구 (도로과)	중구 (치수과)	동대문구 (치수과)	동작구 (치수과)	구로구 (도로과)	비 고
계	3,390	750	750	750	750	390
설계용역비	220	50	50	50	50	20	기 재배정
공사비(1차)	1,980	0	0	0	0	370	기 재배정
		0	400	700	510	0	금회 재배정
공사비(2차)	1,190	700	300	0	190	0	’21년 예산

※ 당해연도 전액 집행을 위해 자치구별 공정을 고려하여 공사비 배분

○ 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리, 빗물마을 조성사업, 시설비

< 예산 배정계획 달라지는 점 >

(단위 : 백만원)

구 분			계획변경 전			계획변경 후
’20 예산	설계비(’20)		220	(종로, 중구, 동대문, 동작, 구로)		220	(변경 無)
	공사비(’20, 1차)		1,730	(중구, 동대문, 동작, 구로)		1,980	(250 증)
	설계비(’21)		250	(선정 예정)		0	(250 감)
’21 예산	설계비(’21)		0	(선정 예정)		200	(200 증)
	공사비(’20, 2차)		1,440	(종로, 중구, 동작)		1,190	(250 감)

※ ’21년 설계는 시장 권한대행 체제 전환, 수방대책 등 일정 지연으로 ’21년에 추진 예정

□ 향후계획

○ ’20.08.       : 빗물마을 공사비 예산 재배정

○ ’20.08.~09. : 공사발주(장기계속공사) 및 착공

○ ’20.09.~11. : 1차 공사시행 및 준공

○ ’21.03.~06. : 2차 공사시행 및 빗물마을 조성완료.  끝.