“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사 주간공정 보고(1~3주차)

1. 소방행정과-7944(2020.8.3.)호 『녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사 착공 안내』와 관련입니다

2. 녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사 주간 공정을 다음과 같이 보고합니다.

【주간공정】

○ 기  간 : 2019. 7. 30.(목) ~ 8. 14.(금)

○ 공정율 : 20%

【금주 공정 세부사항】 (2020.7.30.~14.)

○ 건축, 설비 ⇨ 마로건설(주) (마포구 마포대로12)

- (녹번) 철거작업 전 보양작업

- (녹번) 철거공사

- (녹번) 조적, 미장, 방수 공사

- (녹번, 역촌) 현장 업무 협의

- (녹번) 2층 천장흡음재 설치

- (녹번) 벽체 미송띠장 설치 및 석고보드 붙임

- (녹번) 식당 벽체 MDF붙임

【차주 공정 예정사항】 (2020.8.18.~21.)

○ 건축, 설비 ⇨ 마로건설(주) (마포구 마포대로12)

- (녹번) 2층 천장흡음재 단열재설치 및 벽체 석고보드 설치

- (녹번) 벽체 도장작업

- (녹번) 휴게실 편백나무인테리어 실측 및 업무협의

- (녹번) 벽체 컷팅 및 문틀 설치

- (역촌) 철거작업

- (역촌) 현장 업무협의

붙임 : 주간공정 보고서 각 1부.   끝.

담당자	차영진		장비회계팀장	임지혜		소방행정과장	이대우		소방서장	08/18 이창식
협조자
시행	소방행정과-8448	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)은평소방서 3층 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6023	/전송	02-359-7019	/		/	부분공개(7)