투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(노동정책담당관)
(경유)
제목	강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 실시설계에 따른 공사비(추정) 증액 검토내용 송부

강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 설계용역의 계획 및 실시설계 추진 결과 추정공사비가 당초 예정공사비를 초과하여 증액요인 및 내역을 검토하고 설계자 의견을 첨부하여 통보하오니 향후 사업추진에 참고하시기 바라며, 공사물량에 의한 구체적인 공사비는 실시설계도서 납품 시 제출될 예정이오니 향후 예산 확보에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 설계개요

○ 설계내용: 지하1층 지상4층 전층 리모델링, 보수·보강, 5층 가건물 철거 후 증축 및 E/V 설치 등

○ 설계기간: 2019.12.2.~2020.8.27.(주식회사 오르트건축사사무소 대표 최혜은, 홍석경)

○ 추정공사비: 6,932백만원(당초 6,204백만원)

※ 공사비 증액요인: 건축물 안전성 및 사용성 확보, 설계경제성 검토의견 반영 등 설계계획 변경(자세한 내용은 붙임 참고)

나. 사업추진계획

○ ’20.8.26.: 실시설계도서 납품

○ ’20.8.~10.: 건설사업관리용역 및 공사 발주

붙임 공사비 검토내용 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김민희		건축관리과장	代이용선		건축부장	08/18 진경은
협조자
시행	건축부-14024	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)