문서번호	설비부-12240
결재일자	2020.8.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
전상은		김은덕	08/20 이달영
협조

『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』

준공기한 변경(연기) 검토 보고

2020. 8.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』

준공기한 변경(연기) 검토 보고

『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』와 관련하여, 감리단으로부터 제출된 준공기한 변경(연기) 보고에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 건설사업관리단 ㈜이산 퇴계-20-105호(2020. 8.18.)호

【공사기간 변경 요청에 대한 검토 보고】

Ⅱ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사

□ 공사위치 : 퇴계로2가 교차로 ~ 광희동 사거리

□ 공사내용 : 차도축소(보도확장)에 따른

○ 가로등 분전반 교체(7면), 가로등(주) 교체(113본)

○ 교통신호제어기 교체(6면), 교통신호등 교체(78조)

○ 기타 배관(배선) 등

□ 계약금액 :**************

□ 계약기간 : 2019. 9. 2. ~ 2020. 8.31.

□ 계약업체 : ***************

□ 건설사업관리단 : ***

Ⅲ
		검 토 내 용

□ 준공기한 변경(연기) 사유

○ 선행공정인 토목공사의 공기 연장으로 후속공정인 해당 전기공사의 공사기간 절대 부족

※ 토목공사 준공기한 변경(연기) : 당초 2020. 8.17. →  변경 2020.10.17.

□ 공사기간 변경

공 사 기 간			비 고
당 초	변 경	증·감
2019. 9. 2. ~ 2020. 8.31.	2019. 9. 2. ~ 2020.10.31.	증 61일

□ 감리단 기술검토 의견

○ 퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사 준공기한 변경(연기)에 대해 검토한 결과, 선행공정(토목공정)의 준공기한 변경(연기)로 해당 전기공사의 준공기한 변경(연기)이 필요하다 사료됨.

Ⅳ
		보 고 자 의 견

□ 감리단 실정보고 내용 검토한 결과,

○ 선행공정(토목공사)의 준공기한 변경(연기)로 후속공정인 해당 전기공사의 준공기한 변경(연기)는 타당함.

○ 따라서, 감리단 실정보고는 적정하므로 계약부서에 준공기한 변경(연기) 및 관급자재 납품기한 변경(연기)을 의뢰, 사업완수에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.