문서번호	설비부-12299
결재일자	2020.8.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장
정찬교		08/20 오삼록
협조
	주무관		박희준

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

설계변경 소위원회 심의 요청

2020. 8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호				요청부서	녹색성장과		요청일		2020년 8월 20일
공 사 명	창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 전기공사
공사개요	공사규모		-도로정비 B=6.5~22m, L=1,630m -가로등주 및 보안등주89본, 보안등31SET, 기타등321SET, 신호등주16본
	공사기간		2019.01.11. ~ 2020.09.30
	감 리 사		*************
	설 계 사		*********
	시 공 사		**********
자문 안건명			설계변경 및 계약변경 요청금액의 적정성 자문					요청금액		감 415,136 천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이 ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항 (요약) ○ 내용 : 사업계획 축소에 따른 물량 감소, 관리기관(종로구청, 낙원생활 문화지원센터) 요청사항 반영, 교통신호기 심의 및 협의 결과 반영
책임 건설사업관리기술인 의견(요약) ○ 내용 : 실정보고 사항이 적정하고 설계변경 자문위원회 진행함이 타당함
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 ****** ************************************** ***************************************** *************** **************************** ************************* ******* ********************************* ************************* ****** *********************** ********** ************************ ***************************** ▪ 물량 증감내역 : 내역서 참조						▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 1,069,240천원 - 변 경 : 654,104천원 - 증 감 : 감)415,136천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 가로등 공종 - 신호등 공종
별첨서류		1. 건설사업관리단 기술검토의견서 1부. 2. 설계변경 내역서 1부.				*************** ****************************

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 전기공사
계약금액	1,069,240천원	계약일	2018.12.28	시공사	㈜유니시스엔지니어링
공사기간	2019.01.11. ~ 2020.09.30	낙찰률	86.746%	설계자	㈜동해종합기술공사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감리자	㈜경동엔지니어링 외1개사
공사규모	-도로정비 B=6.5~22m, L=1,630m -가로등주 89본, 보안등 31개, 기타등 321개, 신호등주16본			※ 작성자: 정찬교 (☎3708-8640)

□ 자문 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	비 고
변 경 개 요	변경 도서 참조
공 사 비	1,069,240천원		654,104천원	감)415,136천원
적 용 요 율	낙찰률		신규단가에 낙찰률 적용
설계변경요구자	☐ 발주처 ☑ 계약상대자
적용 근거	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제7절1의 나항
설계변경 근거	방 침	설비부-9886(2020.7.8) 외 3건
	관련규정	공사계약 일반조건 제6, 7절
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 사업계획변경, 발주처 지시사항, 유관기관 요구사항 반영
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	▢ 이행 ☑ 미이행(설계변경 소위원회 심의 후 이행)

□ 관련문서

*실정보고 승인

·설비부-9886(`20.7.8) : 실정보고(가로등) 내부 검토보고

·설비부-8704(`20.6.18) : 실정보고(신호등) 내부 검토보고

·설비부-3573(`20.3.10) : 실정보고(낙원상가 하부 변경) 내부 검토보고

·설비부-15783(`19.10.14) : 실정보고(가로등) 내부 검토보고