		서울공예박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	계약변경 의뢰(2020년 서울공예박물관 시설관리 용역)

1. 총무과-6124(2020.08.13.)호와 관련입니다.

2. 우리 박물관에서 추진 중인 『2020년 서울공예박물관 시설관리 용역』에 대하여 아래와 같이 계약 변경을 요청하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

1) 용 역 명 : 『2020년 서울공예박물관 시설관리 용역』

2) 용역기간 : 2020.08.01. ~ 2020.12.31.

3) 계 약 자 : ***************************

4) 계약금액 : *********************************

나. 변경 내용 : *******

구분	당초	변경	증감
****	*************	*************	*********** ****************

다. 변경 사유 : 가스안전관리자 1인, 1개월 조기투입

- 당초 투입 계획 : 2020.09.01.

- 변경 투입 계획 : 2020.08.01.

붙임) 1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 산출내역서(변경) 1부.

4. 과업내용서(변경) 1부. 끝.

주무관							박상근			총무과장					代송현미					서울공예박물관장					08/15 김정화
협조자
시행			총무과-6169									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 2층(서소문동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-4088						/전송			02-2133-1076					/	sgpark7@seoul.go.kr												/	부분공개(5)