문서번호	환경수질과-4345
결재일자	2020.8.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
길인자		최동주	08/18 代나종택
협조	총무과장		代오승민
	기획예산과장		代이경춘

- 한강공원 낚시안내판 -

정비용역 남품기한 연장 검토보고

2020. 08

한강사업본부

(환경수질과)

- 한강공원 낚시안내판 -

정비용역 납품기한 연장 검토보고

20.8.1부터 지속된 집중호우로 한강공원 침수 및 전면 출입통제에 따라 낚시안내판 정비용역 업체인 디자인썸머로부터 납품기한 연장요청이 있어 검토 후 그 결과를 아래와 같이 보고함.

□ 추진근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 제22조 제2항 및 동법 시행령 제75조의2(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정)

○ 납품기한 연장 요청(디자인썸머, ‘20.8.13)

□ 추진현황

○ 계약개요

- 계 약 명: 한강공원 낚시안내판 정비용역

※ 정비규모 : 10개 안내센터 63개 안내판

- 계약금액: ************

- 계약업체: ***************

- 계약일자: ‘20. 8. 4

- 계약기간: ’20. 8. 4. ~ ’20. 8. 23. (20일간)

○ 추진경위

- ’20. 8. 13. 납기연장 요청 *******

□ 납품기한 연장 검토의견

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 제22조 제2항 및 동법 시행령 제75조의2 규정

- 호우, 해일, 대설, 한파, 가뭄, 폭염, 황사, 조류 대발생, 조수, 화산활동

그 밖에 이에 준하는 자연현상

○ 집중호우로 인한 한강공원 침수 및 출입통제 상황은 계약상대자의 통제범위를 벗어난 것으로 납품기한 연장이 타당함

□ 검토결과 : 남품기한 변경

구 분	계 약 변 경 내 용		비 고
계약금액	당 초	***********	변경없음
	변경후	***********
	증 액	*
계약기간	당 초	**************************	22일 연장 (지연배상금 없음)
	변경후	************************

□ 향후계획

○ 총무과 계약 변경의뢰 : ’20. 8.

○ 낚시 안내판 정비 :  ’20. 9.14까지

붙임  1. 납품기한 연장 요청서(합의각서) 1부.

2. 관련규정 1부.  끝.