“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(우면산가압장 급수체계 개선공사 총차분 7회, 4차분 5회)

1. 우리 본부에서 시행중인 “우면산가압장 급수체계 개선공사”에 대하여 본청 계약심사를 마치고 아래와 같이 설계변경(총차분 7회, 4차분 5회)을 시행하고자 합니다.

가. 공사현황

1) 공 사 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사

2) 공사개요 : 양재아리수올림터 설치 Q=209천㎥/일, 송수펌프 : 7대,

송배수관 D1,200~1,500㎜ L=535m

3) 공사기간

- 총차분 : 2017. 12. 13. ~ 2020. 9. 15.

- 4차분 : 2020.  1.   1. ~ 2020. 9. 15.

4) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비 및 부대비, 시설비

5) 계 약 자 : 국정종합건설㈜ 외 1개사

나. 설계변경 현황 및 사유

1) 설계변경 금액

․ 총차분(7회 설계변경)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	6,028,448,000	6,107,365,000	증) 78,917,000
관급비	3,392,304,000	3,415,106,000	증) 22,802,000
총공사비	9,420,752,000	9,522,471,000	증)101,719,000

․ 4차분(5회 설계변경)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	2,167,728,000	2,246,645,000	증) 78,917,000
관급비	331,408,000	354,209,000	증) 22,801,000
총공사비	2,499,136,000	2,600,854,000	증)101,718,000

2) 계약기간 : 변경없음

3) 변경사유

- 부지경계 옹벽 및 울타리, 출입문 설치 등 관련 신공종 발생 및 물량 반영

- 양재가압장 사업부지 조경공사 반영 등 관련 신공종 발생 및 물량 반영

붙임 :  1. 계약심사결과 공문(본청 계약심사과) 1부.

2. 설계변경 도서제출 공문(건설사업관리단) 1부.

3. 설계변경 내역서(총차분 7회) 1부.

4. 설계변경 내역서(4차분 5회) 1부.

5. 제경비 검증 확인서 1부.

6. 설계변경 현황(상세) 설명서 1부.

7. 설계변경 합의서 1부. 끝.

주무관	최이영		시설과장	김형준		시설관리부장	강호광		상수도사업본부부본부장	08/18 구아미
협조자	주무관	박건수		주무관	이효원		예산팀장	홍경숙
재무회계과장	김분숙
시행	시설과-5277	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1491	/전송	02-3146-1529	/	eiyoung@seoul.go.kr	/	대시민공개