투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시장(계약심사과장)
(경유)
제목	계약심사 요청(동부간선도로확장 3공구 전기공사-설계변경)

우리 본부에서 추진하는 「동부간선도로확장 3공구 전기공사」관련 방음터널 전기실 위치변경에

따른 물량변경 등을 반영한 설계변경을 시행하고자 계약심사 업무처리 규칙 제3조 5호에 따라

붙임과 같이 계약심사를 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공사명 : 동부간선도로확장 3공구 전기공사

2) 위  치 : 동부간선도로 상계근린공원~의정부 시계

3) 기  간 : 2008. 06. 26. ~ 2020. 12. 31.

4) 규  모 : 수전설비, 가로등256등,터널등 1150둥 외

나. 심의금액                                                          [단위 : 천원]

구 분	총공사비	도급비	관급비	이전비	비고(증ㆍ감액)
변경 전	6,298,625	3,915,532	2,208,080	175,013	**230,155
변경 후	6,528,780	4,145,687	2,208,080	175,013

붙임 : 심사요청서 및 설계도서(별도송부) 각 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	손영화		시책사업과장	이종근		설비부장	08/20 이달영
협조자
시행	설비부-12237	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)