문서번호	시설관리과-2959
결재일자	2020.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장
방호익	손창열	08/21 전영주
협 조

한강공원 침수에 따른 피해복구계획 보고

2020. 8

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

한강공원 침수에 따른 피해복구 계획 보고

금번  중부지방 강우(8.1~8.13)에 따른 한강공원이 전반적으로 침수되어 시설물 피해 응급복구 복구 예산 및 조치계획에 대해 보고 드림

강우 및 댐 방류량 현황

❍ 강우량 현황

(8.4  24:00 기준)

지 역	일별 연속 강우량				비 고
	소 계	8.1(토)	8.2(일)	8.3(월)
서 울	145.1	39.1	31.4	74.6	팔당댐 수계 (남한강, 북한강)
춘 천	240.9	25.0	44.9	171.0
이 천	228.6	28.3	143.2	57.1
제 천	315.9	17.7	259.0	39.2
충 주	119.2	21.4	17.1	80.7

❍ 팔당댐 방류량 및 잠수교 수위

일 시	팔당댐 방류량(톤/초)	일 시	충주댐 방류량(톤/초)	일 시	잠수교 수위(m)
8. 3(월) 12:20	14,094	8.3 15:40	2,003.926	8.3 16:00	8.76
8. 6(목) 09:40	18,302	8.5 22:00	2,993.339	8.6 14:00	11.46
8. 9(일) 19:00	11,481	8.7 09:30	4,002.896	8.9 19:00	9.11

- 잠수교 침수(6.5m) 기간(12일) : 8.2(일) 18:20 ~ 8.13(목), 최장기간 침수

대피 및 침수 현황

❍ 공원별 침수현황(8.2~8.9)

구 분	공원별 침수지역
	뚝섬 ･ 여의도 ･ 난지	광나루 ･ 잠실 ･ 반포 ･ 이촌 ･ 양화 ･망원 ･강서･난지
침수지역	고지대 제외 전구역 침수	전구역 침수

뚝섬공원 수변무대	이촌공원 잠수교 하류	반포공원(녹지대)

❍ 시설물 피해 현황

공원명	위 치	피해내용	피해규모	피해금액 (천원)	현황사진
	계			200,000
반포	잠수교 하류	• 수변무대 화강석 계단 파손 및 유실	•B=4m L=50m A=200㎡	50,000
	잠수교 상류	• 수변무대 화강석 계단 파손 및 유실	•B=4m L=50m A=200㎡	50,000
	잠수교 상류	• 전망대 데크 파손 및 유실	•B=3m L=10m A=30㎡	4,400
이촌	반포대교북단상류148M	• 휴식쉼터 데크 파손 및 유실 (2개소)	•B=2.5, 5m A=100㎡ •B=4m L=6m(2개소) A=48㎡	30,000
	반포대교 북단 하류	• 현장사무실 휀스 유실 및 바닥파손	•B=18m L=65m A=1,170㎡ 휀스 L=75M	30,000
	노들섬 호안	• 수목전도에 따른 호안블럭 유실 및 침하 (7개소)	•B=5 m L=6 m A= 210 ㎡ 7개소	17,900
뚝섬	청담대교 상류	• 수변무대 보도블럭 침하	•B=1.0m L=360m A=360㎡	17,700

시설물 복구 작업 소요 비용

❍ 시설물 피해복구 작업

- 반포공원, 이촌공원, 뚝섬공원

․ ‘20. 8. 24 ~ 9.30

- 작업방법 : 사전 계약된 연간단가업체의 장비 및 인력 투입

․ 유실된 화강판석, 보도블럭 교체 및 계단 폐기물 처리

․ 아스팔트 유실구간 응급 복구 및 폐기물 처리

❍ 시설물 복구 소요 비용

구 분	작 업 내 용	소 요 예 산	비 고
서설물 복구	- 시설물 물빠짐 후 복구	200백만원	재난관리기금 지원 요청
계		200백만원

소요예산 조치계획

○ 시설물 피해 복구 실시는 ‘20. 9. 30한 완료 예정

- 잠수교 상 하류  화강석 판석 보수 등

- 노들섬 저수호안(호안블럭) 복구는 소조기 팔당댐 평시 방류량(200ton)시  작업 예정

○ 금번 침수피해 시설물 복구에 소요되는 예산은 재난관리기금 전액 지원요청

- 기금 요청액 : 200백만원

○ 시설물 점검시 경미한 사항은 ‘20년 하천시설물 유지관리 잔여예산       (100,000천원) 활용하여 복구

○ ‘20년 하천시설 예산 현황

(단위:천원)

총예산	집행액	6차작업 금액	관급비	이설비 (폐기물처리비)	집행잔액	비고
2,070,000	1,210,000	445,000	150,000	165,000	100,000

행 정 사 항

○ 한강침수피해 시설물 복구비용은 재난관리기금 배정 후 ‘20년 하천시설 유지관리       및 개선공사에 포함하여 설계변경  및 정산처리.  끝.