문서번호	설비부-12387
결재일자	2020.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	08/21 이달영
협 조

- 아동복지센터 전기시설 개선공사 -

준공기한 연기검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 08.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 아동복지센터 전기시설 개선공사 -

준공기한 연기검토 보고

『아동복지센터 전기시설 개선공사』관련 사용자측의 코로나19 확산 방지를 위한 공사 일시중지 요청 사유로 감리사로부터 준공기한(도급,관급,용역) 연기요청이 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		공 사 개 요

공 사 명 : 아동복지센터 전기시설 개선공사

공사위치 : 서울특별시 강남구 광평로 34길 124 아동복지센터

규    모 : 지상2층/지하1층, 연면적 2,290㎡, 노유자시설

공사내용 : 수배전반, 발전기, 분전반 등 노후 전기시설 교체

계약현황

구분		계약업체	계약금액	공사(용역)기간
도급공사		****	***********	2020.05.29.~2020.08.30
관급자재	고압반	***********	**********	2019.05.21.~2020.09.30
	배전반(저압)	*******	**********	2019.05.21.~2020.09.30
	분전반	*********	**********	2020.05.21.~2020.09.30
	전동기제어반		**********
	조명기구	***************	*******	2019.05.21.~2020.09.30
		***************	*********
		**************	**********
	발전기	********	**********	2019.05.19.~2020.09.30
감리용역		******	**********	2019.06.03.~2020.08.31

Ⅱ
		검 토 내 용

관련근거

〇 코로나19 확산 방지를 위한 공사 일시중지에 따른 공사기간 연장

[필전감-*******001(2020.08.20.)]

준공(납품) 기한 연기 검토

〇 준공(납품) 기한 연기사항

구분		공사기간		비 고
		변경 전	변경 후
도급공사		2020.05.29.~2020.08.30	2020.05.29.~2020.08.30
관급자재	고압반	2019.05.21.~2020.09.30	2019.05.21.~2020.09.30
	배전반(저압)	2019.05.21.~2020.09.30	2019.05.21.~2020.09.30
	분전반	2020.05.21.~2020.09.30	2020.05.21.~2020.09.30
	전동기제어반
	조명기구	2019.05.21.~2020.09.30	2019.05.21.~2020.09.30
	발전기	2019.05.19.~2020.09.30	2019.05.19.~2020.09.30
감리용역		2019.06.03.~2020.08.31	2019.06.03.~2020.08.31

**************************************

*********************************

***************************

*********************

***********************************************************************************

************************************************************************

Ⅲ
		조 치 계 획

***********************************************************************************************

*******************  끝.