문서번호	설비부-12458
결재일자	2020.8.24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	08/24 이달영
협조

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 통신공사」

관급자재(전관방송설비) 납품기한 연기 검토보고

2020. 08.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 통신공사」

관급자재(전관방송설비) 납품기한 연기 검토보고

「서울의료원 권역응급의료센터 건립 통신공사」시행 중 선행공사(건축)의 준공기한 연기에 따른 관급자재(전관방송설비)의 납품기한을 연기코자 보고드림.

1		관련근거

□ 관급자재 납품기한 변경 승인요청 : 동일감리 제20-191호(2020.08.18.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사

□ 공사기간 : 1차 2019.03.27.~2020.08.31(총차 2019.03.27.~2020.09.26.)

□ 도 급 비 : 1차 250,000,000원(총차 589,611,000원)

□ 시 공 사 : ㈜세호영상 대표 박석신

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축,㈜토문엔지니어링 건축사사무소

3		검토내용

가. 납품기한 연기 사유

□ 선행공정(건축) 공사기한 연기에 따른 납품자재(설치)시기 미도래

※ 선행공정(건축 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축공사) 준공기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	비고
준공일자(총차)	~ 2020.08.10.	~2021.07.30.

나. 관급자재 계약현황 및 납품기한 연기내용

번호	물품식별번호	품 명 (규격)	계약자 (납품요구번호)	납품기한		금액	비고
				당초	변경
*	********	******* ******************* ***************	******** ******************	***********	***********	**********	****** **** ***********

※ 관급자재 수량 및 금액 변동 없음

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		조치계획

□ 현장여건 변경(건축 공사기한 연기)에 따른 공사시기 조정으로 통신공사 관급자재 (전관방송설비) 납품(설치)시기 미도래

□ 책임건설사업관리기술자로부터 검토보고 된 내용이 적정하다 판단되어, 현장여건에 맞추어 관급자재 납품기한을 2021.07.30.로 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 :  관급자재 납품기한 변경 승인요청 문서  1부. 끝.