문서번호	정보통신보안담당관-18264
결재일자	2020.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	SNet팀장	정보통신보안담당관		스마트도시정책관
이혁찬	서재호	공병엽		08/24 이원목
협 조

- 시민의 통신기본권 보장 및 스마트도시 인프라 기반 조성 -

공공 사물인터넷(IoT)망 구축 추진계획

2020. 8.

스마트도시정책관

(정보통신보안담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 시민의 통신기본권 보장 및 스마트도시 인프라 기반 조성 -

공공 사물인터넷(IoT)망 구축 추진계획

교통·안전·환경 등 각종 도시문제 해결 및 미래 스마트도시 인프라 기반 확보를 위해 공공 사물인터넷(IoT)망 구축을 추진코자 함

Ⅰ		추진개요

□ 관련법령

○ 전자정부법 제52조(정보통신망의 구축)

○ 국가정보화기본법 제16조(지역정보화의 추진)

○ 전기통신사업법 제64조(자가전기통신설비의 설치)

○ 서울시 사물인터넷도시 조성에 관한 조례

□ 추진배경

○ 인구증가와 도시집중으로 인해 도시문제 심화

- 다양한 도시문제 해결을 위해 첨단기술을 활용한 인프라 확보 필요

- 각종 도시데이터 수집 및 확보를 위한 사물인터넷 서비스 필요

○ 시정 각 분야의 사물인터넷 수요 증가

- 교통·안전·재난·환경 등 시정 전반에 걸친 현장데이터 수집 필요성 증대

□ 추진경과

○ ‘19.  6월	: 스마트 도시데이터 확보를 위한 정보전략계획 수립

○ ‘19. 11월	: 투자심사 – 조건부추진(2단계 투자심사)

○ ‘20.  1월	: 스마트서울 네트워크(S-Net) 추진계획 수립

○ ‘20.  6월	: 스마트서울 네트워크(S-Net) 정보전략계획 수립

Ⅱ		사물인터넷 현황 및 문제점

□ 사물인터넷 현황

○ 서비스 현황(‘19.12월 기준)

- **********************************

▸ ***********************************

- *********************************

▸ ***************************************

○ 자가망 현황

연번	자치구명	구축시기	통신방식	게이트웨이 수량(대)
1	구로구	2018	LoRa	81
2	서초구	2019	LoRa	75

○ 통신방식 : LTE, NB-IoT, LoRa, WiFi, Bluetooth 등

□ 문제점

○ **************************

- ******************************************************

- *********************************************************

○ *****************

- ************************************************************

○ ********

- *******************************************************************

Ⅲ		구축계획

□ 추진방향

○ ***************

- ***************************************************

○ *****************

- ****************************************************************

○ ******************

- **************************************

○ *************************

- ***********************************

□ 추진계획

○ *********************************

- **************

▸ **********************************************************

▸ *********************************

- ****************************

▸ **************************************

▸ ******************

▸ **************************

- *************

▸ *************************************

- **********************

▸ ***********************************

○ ***************************

- *****************************

▸ *******************************************

▸ ****************************

▸ *************************

- **************************

▸ ****************************

▸ *********************************************************

**********************************

○ *********************************

- **************

▸ *******************************

▸ *************************************

- *******************

▸ **************************************

▸ ***************************

*******************

□ 소요예산

○ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

***	*	***	***	***	***
*	*****	*****	*****	*****	*****
******	*****	***	*****	*****	*****
******	***	***	*	*	*
*******	***	***	*	*	*
******	***	*	*	***	*

○ 세부 산출내역

(단위 : 천원)

***	*	*******
*	*********
*** ****	*********	********************************** ********************************
*** ****	*******	********************************* *********************************** ************************************ ***********************************
*** ***	*******	************************************ ******************************* ***************************** ********************************* *******************************
*** ****	*******	************************************ ***********************************

Ⅳ		향후계획

○ ******************************

○ ********************************

○ ******************************

○ *****************************