투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독1처
제목	화곡고가차도 보수공사 현장실정 보고에 대한 회신

1. 공사감독1처-5382호(2020.8.21.) 및 시설보수과-6320호(2020.8.24.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 『화곡고가차도 보수공사』 현장실정보고 내용에 대하여 아래와 같이 회신하오니 사업시행이 원활하게 진행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 화곡고가차도 보수공사

나. 회신내용

1) 보도부포장 전체는 적정 품질확보 위해 초속경콘크리트포장으로 변경반영

2) 보차도 연석부는 양호한 상태로 단면보수는 제외하고 열화방지 등 내구성 향상을 위한 표면보수로 변경하고 작업이 곤란한 구간은 보수물량 및 위치변경 반영

3) 현장여건에 맞게 전기공급은 발전기 사용 반영

4) 상기와 같이 서울시설공단 검토보고에 대하여 승인 시행토록하고 추후 설계변경시 정산반영 조치.

붙임  관련보고내용 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	주영진		시설보수과장	08/25 代윤동원
협조자
시행	시설보수과-6321	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동) 1층 도로보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7951	/전송	02-2657-7950	/	ejooyjin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)