코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(준공기한 연기)

우리과에서 시행 중인 아래 용역에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : G밸리 도로구조개선 기본 및 실시설계 용역

2. 계 약 자 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소, ㈜진우엔지니어링코리아

3. 준공기한 연기계획

구 분	당 초	변 경	비 고
준공 기한	2020년 08월 31일	2021년 04월 30일

4. 귀책사유 : 서울특별시

5. 연기사유 : 남측교량 신설 노선 위치 및 형식 선정 검토에 따른 과업기간 추가 수요, 기본 및 실시설계 수행을 위한 절대 공기 부족

붙임   1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 준공기한 연기 요청 공문 및 합의각서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	권순갑		도로시설계획팀장	황원근		도로계획과장	08/27 안대희
협조자
시행	도로계획과-11775	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)