“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

1. 광화문광장추진단-13179호(2019.11.28.)와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행하고 있는 「새로운 광화문광장 조성에 따른 전략환경영향평가 용역」에 대해 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 새로운 광화문광장 조성에 따른 전략환경영향평가 용역

나. 계약금액 : 금51,765,000원정(금오천일백칠십육만오천원정)

다. 용역기간 : 2018.10.05 ~ 2019.11.29.(계약 2018.10.04.)

라. 계약업체 : ㈜대영이이씨 대표 정준화

**********************************************************************************

바. 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	금51,765,000원정	금51,765,000원정	변경없음
계약기간	2018.10.05 ~ 2019.11.29.	2018.10.05 ~ 2019.12.19.	20일 연장

***********************

******************

**************끝.

	광화문광장추진단장
주무관	황서현		광장계획팀장	이강수		광화문광장사업반장	11/28 임창수
협조자
시행	광화문광장추진단-13197	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩9층	/
전화	02-2133-2030	/전송	02-2133-1080	/	spinosus@seoul.go.kr	/	부분공개(5)