문서번호	시설과-56
결재일자	2020.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	하종식	박종수	01/07 최현실
협 조
	서울숲공원지원과장		송복식

율현공원 수목량 확충 사업계획

2020. 1.

동부공원녹지사업소

(시설과)

율현공원 수목량 확충 사업 계획

율현공원 내 부족한 그늘목 식재 등 수목량 확충 사업을 시행하여 공원경관 개선 및 시민들에게 쾌적하고 안전한 공원을 제공하고자 함

사업개요

❍ 대상지 : 율현공원(강남구 밤고개로21길91)

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 5.

❍ 사업내용 : 그늘목 식재 등 수목량 확충

❍ 총사업비 : 571백만원(설계:33백만원, 공사:538백만원)

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 응봉공원 시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 현황사진

산책로 주변	나대지

시행계획

❍ 실시설계(33백만원)

- 계약방법 : 수의계약

- 기    간 : 착수일로부터 30일

- 계약자격 : 추정가경이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서「여성기업지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 여성기업으로, 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제21조에 의거 건설부문 조경분야 활동주체로 신고된 자 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사 사무소를 등록한 업체와 계약

❍ 공사시행(538백만원)

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 기    간 : 착공일로부터 50일

- 입찰참가자격 : 건설기술관리법에 의한 조경공사업으로 등록된 업체로 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

사업효과

❍ 공원 내 부족한 그늘목 식재 하여 공원경관 개선 및 쾌적한 공원환경 제공

❍ 공원 수목을 확충하여 이용자 만족도 제고

추진계획

❍ 2020. 1.       : 기술용역 타당성 심사 요청

❍ 2020. 1. ~ 2. : 실시설계 용역 시행

❍ 2020. 3.       : 계약심사 및 공사 발주

❍ 2020. 4. ~ 5. : 공사 시행 및 준공.  끝.