문서번호	교통운영과-2837
결재일자	2020.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광화문광장교통대책팀장	교통운영과장
배정근		이유국	02/18 강진동
협조

「광화문광장 주변 교통개선」관련

기본 및 실시설계 용역 계약변경 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  2.

교통운영과

「광화문광장 주변 교통개선」관련

기본 및 실시설계 용역 계약변경 검토

새로운 광화문광장 조성 계획변경 및 기간 조정에 따라「광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역」계약기간 연장에 대해 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : ’19.7.29.~’20.2.28.

○ 계약금액 : 126,880,000원(금 일억이천육백팔십팔만원)

○ 계약업체 : ㈜도화엔지니어링 대표 박승우

○ 과업 주요내용

- 교통량·신호운영·도로 기하구조 등 각종 현황 및 교통체계 문제점 조사

- 광화문광장 주변 차로·신호체계 개선, 교통안전시설 보완 등 개선안 마련

- 교통안전시설 심의, 설계 및 공사비 산출, 교통개선사업 시행지점 모니터링 등

□ 추진경과

○ ’19.7.10.     : 광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역계획 수립

○ ’19.7.29.     : 용역계약

○ ’19.8.20.     : 과업 착수보고

○ ’19.9.19.     : 광화문광장 재구조화 연기 기자설명회(시장)

- 사업시기보다 행안부 및 시민(단체), 지역주민 등과 소통후 사업 추진

○ ’19.10.~12. : 광화문광장 재구조화 관련 시민의견 공론화

- 시민공개 토론회(4회), 현장시장실(5개동), 전문가토론회(3회), 시민 대토론회(2회) 등

○ ’20.2.13.     : 시민소통 결과 기자간담회(부시장)

- 시민소통 결과, 전면보행화 단계적 추진, 집회·시위 특별운송대책, 지역민원 해결 방안 등

□ 계약변경

******

********************************************************************************************************.

*********************************************************************************************************************************

○ 계약기간 연장

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	*******************	********************	*******

********************************

○ 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

□ 향후계획

○ ’20.2.~4. : (지역민원) 기본설계, 시경(종로서) 협의 및 심의

○ ’20.5.~6. : (광화문 광장 및 주변) 교통안전시설 심의

○ ’20.7.~8.  : 실시설계 시행

⇒ ① 본 용역은 지난해 9월부터 지역주민 의견수렴 결과, 지역주민의 민원사항으로 도출된 교통개선사업(5개동 8개사업)을 우선 시행하고

② 광화문광장 주변 교통개선사업(TSM)은 광화문 광장 기본설계를 완료하고 교통영향평가결과가 확정되면 추진

붙 임 : 1. 준공(납품)기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.