문서번호	도로보수과-5335
결재일자	2020.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관		도로보수과장		남부도로사업소장
김순한		한수영		08/31 변봉섭
협 조

『무단횡단 금지시설 설치』관련

교통분야 재배정 예산 집행 계획

2020. 8.

남부도로사업소

도로보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『무단횡단 금지시설 설치』관련

교통분야 재배정 예산 집행 계획

도시교통 소통개선 및 보행자 사망사고 예방을 위해 재배정된 예산에 대해 집행 계획을 아래와 같이 수립․추진코자 함

Ⅰ		추 진 근 거

무단횡단 금지시설 설치 구간 및 예산 재배정 알림

- 교통운영과-4454호, ’20.3.14.

Ⅱ		재배정 내역

예 산 재 배 정			배정부서	재배정액 (천원)	비고
부서,정책,단위	세부사업	통계목
교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화	교통사망사고줄이기 사업	시설비 (401-01)	남부도로사업소 도 로 보 수 과	583,000

Ⅲ		집 행 계 획

사 업 명 : 무단횡단 금지시설 설치

사업기간 : 2020. 9. ~ 11.

소요예산 : 금583백만원(금오억팔천삼백만원)

설치연장 : 13개 노선, 총 5,830m

설치구간 세부내역

연번	도 로 명	설 치 구 간	연 장 (m)	예 산 (백만원)	중 앙 선 차로조정	비 고
1	여의대방로	동작구 대방지하차도 ~성남고교 입구	160	16	불필요	조재민
2	현충로	동작구 흑석역~명수현대아파트	310	27	필요	조재민
3	동작대로	동작구 이수교KCC스위첸2차 아파트교차로~ 동작동 산19	100	10	필요	조재민
4	방배로	서초구 내방역~ 방배삼호아파트	1,100	88	필요	박종헌
5	신반포로	서초구 신반포로(잠원IC) ~기린한방병원 교차로	300	26	필요	김순한
6	도신로	영등포구 우신초교 교차로 ~신길삼거리	850	62	불필요	김순한
7	호암로	관악구 미림여고입구R ~미림여고	430	34	불필요	김현오
8	은천로	관악구 현대시장사거리 ~구암지구대 앞	500	15	불필요	김현오
9	독산로	금천구 구로전화국사거리 ~문성터널입구 삼거리	350	33	필요	정철식
10	사당로	동작구 숭실대입구~상현중	410	41	필요	조재민
11	효령로	서초구 서초3동사거리 ~서울고교사거리	600	45	필요	박종헌
12	보라매로	동작구 보라매e편한세상아파트 입구~관악구 관악노인종합복지관 앞	250	19	필요	김현오
13	독산로	금천구 독산동193-29~ 독산동1023-24	470	36	필요	정철식
합 계			5,830	452

설치방안

- 13개소 중 설치비 2천만원 미만 4개소(여의대방로, 동작대로, 은천로, 보라매로) 제3자단가 조달구매 시행

- 13개소 중 2천만원 이상 9개소는 3개 권역으로 나누어서 1억원이상  “조달청 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁”으로 구매

○ 1권역: 현충로, 도신로, 사당로 (130백만원)

○ 2권역: 방배로, 신반포로, 효령로 (159백만원)

○ 3권역: 독산로 2개 구간, 호암로 (103백만원)

- 중앙선, 차선 조정은 관할 경찰서 교통규제심의 및 실시설계 진행 사항 고려하여 노면표시공사 별도 발주(입찰공고 중)하여 진행 중임

- 중앙선, 차선 조정이 완료된 2개소는 지역 담당자가 우선 제3자단가 조달구매 설치 : 여의대방로, 은천로

Ⅳ		향 후 계 획

무단횡단 금지시설 관급자재 구매 : 2020. 9. ~ 10.

무단횡단 금지시설 현장설치 : 2020. 9. ~ 11.

- 현장설치는 노면표시 및 포장공사 여건․일정에 따라 조정될 수 있음

현장점검 및 납품검사 : 2020. 11.

붙 임 : 관련 공문 각 1부.  끝.