문서번호	지역돌봄복지과-16156
결재일자	2020.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	지역돌봄복지과장
박슬기	김은숙	08/31 하영태

- 하계종합사회복지관(노원) 2,3층 수직구조대 설치 -

2020년 긴급 기능보강사업 변경 검토보고

2020. 8.

복지정책실

(지역돌봄복지과)

- 하계종합사회복지관 2,3층 수직구조대 설치 -

2020년 긴급 기능보강사업 변경 검토보고

설계변경에 따른 구조물 단가 상승, 추가분 설치에 따른 시설 자부담을 증액하고자 변경요청한 건으로 당초 사업과 연계된 안전성 확보를 위한 사업변경은 타당함

□ 요청사항

◯ 2020년 종합사회복지관 기능보강사업 계획 변경 신청

(노원구 복지정책과-22568, 2020.8.13.)

◯ 시 설 명 : 하계종합사회복지관

◯ 사 업 명 : 2, 3층 수직구조대 설치

◯ 요청내용 : 설계변경 및 추가설치(하부보조틀)에 따른 자부담 증액

□ 사업변경 신청사항

- 수직구조대 층고 측정방식의 차이로 설계·규격 변경에 따른 구조물 단가가 상승(1대/50천원)되었으며, 현장 조사 결과 복지관 2층의 경우 1층 바닥부터 2층 난간까지의 높이가 낮아 하부보조틀 추가 설치하고자 자부담 증액 승인 요청

□ 검토결과 : “승인”

◯ 승인내역 – 설계변경 및 추가설치(하부보조틀)에 따른 자부담 증액

◯ 검토의견

- 수직구조대 단가 상승, 현장 층고가 낮아 2층 하부보조틀 추가설치 작업은 화재발생시 피난기구의 역할로 이용자 안전 확보를 위한 본래 사업 목적에 부합하므로 자부담 증액 집행이 타당할 것으로 판단됨.

◯ 총사업비 : *********************

□ 기능보강사업 변경 대비표

◯ 변경 대비표

(단위 : 천원)

사업명	기 존			변 경			증 감
	예 산		내 용	예 산		내 용
2,3층 수직구조대 설치	시비	*****	1) 자동개폐장치 설치공사 2) 비상탈출구 샤시공사 3) 수직구조대 설치공사 ① 수직구조대(4.9m→4.5m) ② 수직구조대(8.2m→7.8m) ③ 앙카볼트 ④ 설치비	시비	*****	1) 자동개폐장치 설치공사 2) 비상탈출구 샤시공사 3) 수직구조대 설치공사 ① 수직구조대(4.57m→4.5m) ② 수직구조대(8.15m→7.7m) ③ 앙카볼트 ④ 설치비 ⑤ 하부보조틀(H300)	*** ********
	구비	*****		구비	*****
	자부담	*		자부담	***
	총액	*****		총액	*****

붙임 : 1. 자치구(노원구) 사업변경 승인요청 공문 각 1부.

2. 기능보강 사업변경을 위한 검토자료 일체 각 1부.