코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장(건축자산사업부)
(경유)
제목	준공기한 연장 검토 요청에 대한 회신(한옥체험시설)

1. 서울주택도시공사 건축자산사업부-2516(2020.8.28.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 우리시에 제출하신 서울 공공한옥 한옥체험시설 리모델링 설계용역 준공기한 연장 검토 요청에 대해 아래와 같이 회신합니다.

가. 검토요청 내용

- 한옥체험시설 준공기한 30일 연장에 대한 우리시의 검토 의견

나. 검토결과

- 설계용역 기간 30일 연장은 적정하다고 판단됨. 다만, 추가 연장은 우리시의 당초 사업 계획에 중대한 영향을 미치므로 공정관리에 만전을 기하시기 바람.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박강덕		건축자산지원팀장	최장길		한옥건축자산과장	전결 08/31 신동권
협조자
시행	한옥건축자산과-8666	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-5317	/전송		/	moolkae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)