문서번호	한양도성도감-8799
결재일자	2020.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성정책팀장	한양도성도감과장
최지애		김종필	08/31 안중호
협조

「`20년 한양도성 풍화성돌 및 각자성석 보존처리」

설계변경 검토 보고

2020. 8.

문 화 본 부

(한양도성도감)

「`20년 한양도성 풍화성돌 및 각자성석 보존처리」

설계변경 검토 보고

「한양도성 풍화성돌 및 각자성석 보존처리공사」관련 보존처리 전문가 자문결과 반영하여 설계변경(1회) 계약시행 내용을 검토하고 이에 대한 방안을 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : `20년 한양도성 풍화성돌 및 각자성석 보존처리공사

○ 공 사 비 : *************

○ 공사기간 : ‘20. 5. 20 ~ ’20. 11. 15

○ 시 공 사 : **********************

○ 감 리 사 : ******************

□ 추진경위

○ `20.   5. 27  : 공사 착수

○ `20.   6. 12  : 성돌 보존처리 전문가 자문회의 1회

○ `20.   7.  2  : 한양도성 낙서정비공사 자문회의(예비준공검사)

○ `20.   8. 24  : 설계변경 요청(한양도성도감 → 시공사, 감리사)

□ 설계변경 내용

○ 관련근거

- 공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

- 한양도성 성돌 보존처리 자문회의 결과보고〔한양도성도감-5654, 6771호]

○ 「시공사(담원문화유산)」 설계 변경 내용 : 계약금액 및 공사기간 변경

(단위:원)

구분	변경 전(당초)	변경 후	증 감
계약금액	**********	**********	**	**********
공사기간	**********************	**********************	**	***

※ 붙임 변경내역서 등 관련서류 참조

○「감리사(대연건축사사무소)」 설계 변경 내용

: 시공사의 공사기간 증가에 의한 문화재 비상주 감리 기간 연장

구분	변경 전(당초)	변경 후	증 감
계약금액	*********	*********	*******
사업기간	**********************	*********************	**	***

○ 주요 변경사유 및 내용 : 성돌 풍화상태 및 보존처리 자문회의 의견 반영 등

- 목멱산구간 풍화성돌 암석강화처리 2.34㎡ 추가

: 풍화성돌 균열부 수지충진 과정에서 부스러짐이 심각한 성돌을 선별하여 강화처리

- 목멱산구간 풍화성돌 균열부 수지처리 2.68㎡ 추가

- 낙산지역 30구간 낙서 정비된 풍화성돌 강화처리 27.64㎡ 실시

: 낙서가 정비된 성돌 표면의 풍화 속도 억제 및 예방을 위하여 경화처리 실시

○ 단가 적용(공사계약 일반조건 제7절)

- 기존 비목 단가(물량 증․감) : 계약단가 적용

□ 처리의견

○ 설계변경 검토의견서 및 내역서를 검토한 결과, 관련근거가 적정하므로 설계변경 계약을 추진하고저 함

붙임 : 1. (시공사)설계변경 내역서 등 관련서류 1부

2. (감리사)설계변경 검토의견서 및 관련서류 1부

3. 보존처리 자문의견서 2부.  끝.