문서번호	시설보수과-3115
결재일자	2020.9.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
신재현	우배용	조선행		09/01 한성현
협 조

- 근무환경개선공사 -

실정보고(2차) 검토 보고

2020. 8.

난지물재생센터

(시설보수과)

- 근무환경개선공사 -

실정보고(2차) 검토보고

난지물재생센터 근무자운영실 및 작업실 근무환경개선공사 관련 실정보고(2차)가 있어 先 공사시행 後 설계변경 하고자 함.

□ 관련근거

○ 서울시설공단 공사감독2처-13203(2020.8.27.)호 (물량변동)

□ 용역개요

〇 공 사 명: 난지물재생센터 근무자운영실 및 작업실근무환경 개선공사

〇 공사기간: 2020. 05. 28 ~ 2002. 10. 31

〇 도 급 비: 1,226,811천원

〇 공사개요: 근무자 운영실(11개소) 리모델링, 부대공 1식

〇 도 급 자: ㈜ 정건  대표 정성준

□ 실정보고 내용 (세부내용 붙임 참조)

〇 주요변경내용

- 슬러지1처리장(제2계열전기실): 바닥마감재변경, 하지철물 추가, 벽체마감재 변경 등

- 슬러지2처리장(초침전실A) : 운영실 및 휴게실 천정마감재 교체, 하지철물 추가 등

〇 부분 공사비(개략) 변동내역 --- 증49,243천원

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
제2계열전기실	7,670	32,252	증) 24,582
초침전실(A)	0	24,661	증) 24,661
공 사 비	7,670	56,913	증)49,243	제경비 포함

□ 검토의견

- 예산확보방안 : 설계변경시 낙찰차액 사용

- 감독기관(서울시설공단) 실정보고에 대해 승인하고, 추후 물량정산 및 설계변경토록 통보하고자 함.

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 관련 공문 1부.  끝.