문서번호	설비부-12938
결재일자	2020.9.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
손영화		이종근	09/01 이달영
협조

「동부간선도로확장 3공구 전기공사」

설계변경관련 소위원회 심의 검토 보고

2020.  9.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「동부간선도로확장 3공구 전기공사」

설계변경관련 소위원회 심의 검토 보고

본 공사관련 설계변경을 시행하고자 계약심사 요청하였으나, 우선시공 완료된  물량이 있어 계약심사 제외대상으로 반려되어, 설비부 설계변경 소위원회에 심의  요청하고자 검토 보고 드림.

1		공사개요

□  공사명: 동부간선도확장 3공구 전기공사

○ 규모: 상계주공15단지~의정부 시계 간(2.25㎞) 도로확장(4차로→6차로)

- 수전설비, 가로등 256등, 터널등: 1,150등

○ **************************************

○ 공사기간 : 08.6.26. ~ 20.12.31.

○ ******************

○ **********

(단위: 원)

**	****	********	****	**
**	*************	*************	**********************
**	*************	***********	*********************	**

2		검토내용

□  관련근거

○ 계약심사 요청(동부간선도로확장 3공구 전기공사) : 설비부-12237호(‘20.8.20.)

○ 설계변경 심사 요청에 대한 회신 : 계약심사과-13826(‘20.8.26.)

□  주요내용

○ 계약심사 요청 내용

- 설계변경 사유 : 방음터널 전기실 위치변경 등에 따른 물량변경

- 심의금액

(단위:천원)

구 분	총공사비	도급비	관급비	이전비	비고
변경 전	6,298,625	3,915,532	2,208,080	175,013	**230,155
변경 후	6,528,780	4,145,687	2,208,080	175,013

○ 계약심사 반려사유

- 설계변경 대상 공사 중 우선시공 완료된 물량이 있어 관련규정에 의거   ‘설계변경 심사 제외 대상사업’에 해당됨.

※ 관련규정 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제3장 제5절

(계약상대자와 합의하여 우선시공한 설계변경은 심사 제외 대상임)

□  보고자 의견

○ 본 공사 설계변경 관련 계약심사 요청하였으나, 우선시공 완료된 물량이 있어 심사 제외 대상사업으로 반려되어, 설비부 설계변경 소위원회에 심의 요청 후 그 결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

○ 향후계획

- 20. 9. : 설계변경 소위원회 심의 요청

- 20.10. : 설계변경 시행

- 20.12. : 공사준공

붙임: 설계변경 심사요청에 대한 회신(계약심사과) 1부.  끝.